문서번호	시설과-584
결재일자	2017.2.2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관	주무관		시설과장		관리부장		서울대공원장
박도원	조대복		공헌구		김명용		02/02 송천헌
협 조
	주무관					이춘한
	전문관					황인공

해양관 기계 및 전기 개보수공사 공사중지 및 납품기한 연기 보고
해양관 기계･전기 개보수공사 - 공사 일시정지 및 관급자재 납품기한 연기 보고 -

2017. 2월

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 1호~8호	□	■

해양관 기계･전기 개보수공사

- 공사 일시정지 및 관급자재 납품기한 연기 보고 -

동물원 AI 발생에 따른 출입 통제 관계로 『해양관 기계･전기 개보수공사와 관급자재 구매』건에 대해 공사 일시정지와 관급자재 납품기한을 연기코자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 공사계약 일반조건 제32조(불가항력)

□ 동물원 AI 비상대책상황보고 회의 내용 : ‘16.12.17.

○ 동물원 내 AI 발생으로 ‘16.12.18일부터 AI 해제시까지 출입 통제

Ⅱ		계약현황

□ 시설공사 및 관급자재 계약현황

구분	공사 및 납품명	계약상대자	계약기간 및 납품기간	계약금액	비고
기계	해양관 기계설비 개보수공사	㈜일승기계산업 대표 김병근	‘16.12.12. ～ ’17.06.09.	***********
	해양관 기계설비 관급자재 (냉난방기)	엘지전자(주) 대표 정도현	‘16.12.15. ～ ’17.03.20.	*********
	해양관 기계설비 관급자재 (공기순환기)			*********
	합 계			***********
전기	해양관 전기시설 개보수공사	승기이앤씨(주) 대표 김승수	‘16.12.15. ～ ’17.06.12.	***********
	해양관 전기시설 개보수공사 감리용역	㈜석윤인곡기술사사무소 대표 최종범	‘16.12.01. ～ ’17.05.29.	**********
	폐쇄형 분전반(배전반)	㈜베스텍 대표 장세용	‘16.11.17. ～ ’17.03.31.	**********
	폐쇄형 분전반 (디젤발전기)	보국전기공업(주) 대표 곽기영	‘16.11.17. ～ ’17.03.31.	**********
	합 계			***********

(단위: 원)

※ 관급자재 계약금액은 조달수수료 제외금액임.

Ⅲ		추진계획

□ 공사 2건 및 감리용역은 2월말까지 공사 일시정지

○ AI로 인한 공사 일시정지 기간: ‘16.12.18. ~ ’17.02.28.(73일)

※ 대공원 AI 방역 완화 2단계 ‘17. 3. 1. 적용하여 반영

□ 관급자재 4건에 대해서는 7월말까지 납품기한 연기 요청

○ 선행 공정인 건축공사 일정을 고려한 납품기간 연장

Ⅳ		행정사항

□ 계약상대자에게 공사 일시정지 통보(시설과 ⇨ 계약상대자)

□ 관급자재 4건 납품기한 연기 요청(시설과 ⇨ 총무과)

□ 공사 및 감리용역 건에 대한 설계변경 추진

○ 공사 일시정지 기간(73일)만큼 공사기간 연장.  끝.