문서번호	교량보수과-2771
결재일자	2014.5.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	서부도로사업소장
백운경		代정상모	05/01 김만수
협조

홍제천고가교(성산2-2,3램프) 내진성능개선공사 수량정산 및 실정보고 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5

서부도로사업소

(교량보수과)

홍제천고가교 내진성능개선공사 실정보고

홍제천고가교 내진성능개선공사의 책임감리용역 수행에 따른 감리단의 정산 및 현장 실정보고에 관한 검토 보고임

Ⅰ		공 사 현 황

공 사 명 : 홍제천고가교 내진성능개선공사

공사기간 : 2013. 5. 23 ~ 2014. 1. 14

공사개요 : - 성산램프 2-2교 : 전단키 보강 4개소

- 성산램프 3교 : 받침보강 61개소

도 급 비 : 1,553,383,700원

시 공 사 : 나라로드(주), (주)형제종합건설

감 리 단 : (주)신명건설기술공사

Ⅱ		보 고 내 용

가. 준공 수량 정산

○ 성산램프 2-2교

- Sole Plate 접착 : 라이너 충전으로 에폭시 수량 삭제 (0.896㎡)

- 감쇄기 제외로 인한 강판자재 삭제 (1.267ton)

○ 성산램프 3교

- Sole Plate 접착 : 라이너 충전으로 에폭시 수량 삭제 (0.896㎡)

- 유도배수로 불요로 수량삭제(감27.8m)

-  교통통제 비용 정산으로 인한 수량 감소(6일)

-  철근 수량 오류로 인한 수량 증가(2.268ton)

-  고재처리 수량 누락으로 인한 반영(27.811ton)

- 기타 경미한 수량의 정산

나. 점검통로 설치

○ 상기와 같이 준공수량 정산으로 감액되는 금액 98,000천원을 교량점검 및   유지관리가 용이하도록 성산램프3교의 높은교각에 점검통로 설치

( 4개소, AP3, AP5, AP13, AP14 )

※ 교량보수과 –2360(2014. 4.11)으로 기 검토지시

다. 수량 및 금액변경 내역

○. 준공 수량 정산

(금액단위 : 원)

공 종	단위	수 량			금 액
		당 초	변 경	증 ․ 감
A. 성산램프 2-2교					-1,958,324
- Sole Plate 접착	㎡	0.896	-	-0.896	-340,013
- 앵커소켓 연결	EA	80	80	-	-404,560
- 보강철근 연결	EA	122	122	-	-308,660
- 자재 인상	Ton	1.895	0.892	-1.003	-21,662
- 케미칼 앵커	EA	4	-	-4	-60,024
- 강판	Ton	1.846	0.579	-1.267	-1,247,212
- 고재 처리	Ton	1.362	0.244	-1.118	423,807
B. 성산램프 3교					15,876,768
- Sole Plate 제작 및 설치 (670×720×57)	Ton	3.454	3.664	0.210	209,394
- Sole Plate 접착	㎡	46.396	-	-46.396	-17,606,353
- 앵커소켓 연결	EA	244	244	-	-5,497,564
- 보강철근 연결	EA	1,440	1,440	-	-3,643,200
- 유도 배수	m	58.102	-	-58.102	-1,012,078
- 자재 인상	Ton	45.321	67.637	-22.316	481,981
- 교통통제 비용	일	101	95	-6	-2,435,112
- 강판	Ton	57.080	44.823	-12.257	-12,065,570
- 철근	Ton	0.514	2.782	2.268	1,396,837
- 고재처리	Ton	-	27.811	27.811	-10,542,483
C. 직접공사비계	식	-	27.811	27.811	-52,672,472
D. 제 경 비	식	-	-	-	-45,327,628
E. 도 급 액	식	-	-	-	-98,000,000

○. 점검통로 설치

(금액단위 : 원)

공 종	단 위	수 량			금 액
		당 초	변 경	증 ․ 감
A. 성산램프 3교					66,590,916
- 점검통로 설치	개소	-	4	4	66,590,916
C. 직접공사비계	식	-	-	-	66,590,916
D. 제 경 비	식	-	-	-	31,409,084
E. 도 급 액	식	-	-	-	98,000,000

Ⅳ		조 치 계 획

○ 책임감리단 검토보고와 같이 준공 수량 정산에 따라 감액되는 공사비를 교량점검 및 유지관리가 용이하도록 성산3교의  높은 교각에 점검통로를 도급비 한도내에서 설치토록하고 추후 설계변경시 반영토록 조치하여 공사   추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1) 실정보고 관련공문(감리단) 1부. 끝.