투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(정산) 시행(어린이대공원 놀이동산 CCTV구매설치)

1. 시설과-1396(2014.04.24)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진 중인「어린이대공원 놀이동산 CCTV구매설치」에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 납 품 명 : 어린이대공원 놀이동산 영상감시설비(CCTV)구매설치

나. 계약금액 : 금190백만원

다. 납품기간 : 2014.02.25 ~ 2014. 05.16

라. 납품업체 : (주)영국전자 대표 김배훈

마. 변경사유 : 물량정산

바.  변경내역

구 분		도 급 비			비 고
		당 초	변 경	증 감
납품금액		190,000,000	185,851,750	감)4,148,250
납품액	공급가액	172727,273	168,956,136	감)3,771,137
	부가가치세	17,272,727	16,895,614	감)377,113
	계	190,000,000	185,851,750	감)4,148,250

사. 예산과목 : 공원녹지정책과,공원녹지정책개발및만족도개선,시책주요공원조성,

어린이대공원놀이동산재조성,시설비및부대비,시설비

붙임  1) 설계변경 검토 보고서 1부

2) 변경설계서 1부.  끝.

주무관	박진우		시설팀장	홍순철		시설과장	05/01 변규열
협조자	주무관	지정희
시행	시설과-1551	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소	/
전화	02-2181-1156	/전송	02-2181-1169	/	pjwooo@seoul.go.kr	/	대시민공개