함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	물품 변경계약 체결통보(도막방수재 조달구매)

1. 시설관리과-9678(2014.04.28)호와 관련입니다.

2. 『도막방수재 조달구매』건에 대하여 아래와 같이 변경 계약체결 하였음을 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 건    명 : 도막방수재 조달구매

나. 계약내용 : 납품기한 변경

건 명	계약업체	계약금액(원)	납품 기한		변경사유
			당 초	변 경
도막방수재 조달구매	㈜비앤비	46,212,700	2014.05.15	2014.07.15	서울시민디자인위원회 심의후 납품요청

붙  임 : 분할납품요구 및 통지서1부.  끝.

	행정지원과장
주무관	서경란		행정관리팀장	윤재승		★행정지원과장	05/02 김규복
협조자
시행	행정지원과-9463	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 고산자로 10길 13(행당동 142-1)	/
전화	02-3146-2619	/전송	02-3146-2678	/		/	대시민공개