다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	(주)대한콘설탄트 대표 이우정
(경유)
제목	준공기한 연기 알림

1. 서울시정 발전을 위해 적극 협조하여 주시는 귀 사에 진심으로 감사드립니다.

2. 귀 사와 계약 체결하여 시행중인 ‘한강상 교량 연결램프 구조개선(강남지역) 기본 및 실시설계용역’에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기예정임을 알려드리오니 변경계약 체결 등 필요한 조치를 이행하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기내역

- 당 초 : 2014.05.15

- 변 경 : 2014.10.31

나. 연기 사유

- 올림픽대로 동호․올림픽대교 남단 연결램프 설치(안)에 대한 주민의견 수렴 및 관계기관 협의(하천협의 등) 추가기간 소요에 따른 과업기간 연장 필요. 끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관	정용훈		도로정책팀장	임춘근		도로계획과장	전결 05/02 형태경
협조자
시행	도로계획과-5774	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110 도로계획과 10층	/
전화	02)2133-8067	/전송	02)2133-0763	/	hoon0916@seoul.go.kr	/	대시민공개