투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	하도급 변경계약(기간연장 및 정산) 통보

1. 우리부에서 시행중에 있는 『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』에 대한 하도급 변경계약(기간연장 및 정산) 내용을 아래와 같이 통보합니다.

∘ 하도급 계약(변경) 현황

공 종	원도급자	하도급자	당 초				변 경				비고
			하도급기간	도급액 (천원)	하도급액 (천원)	하도급 비율(%)	하도급기간	도급액 (천원)	하도급액 (천원)	하도급 비율(%)
구조물철거	대림산업㈜ 김 윤	(주)성수프런티어 박영희	2012.07.11 ~ 2014.03.31	623,700	531,300	84.92	2012.07.11 ~ 2014.04.30	1,012,000	850,300	84.02	기간연장 및 정산

붙임 : 관련서류(별도송부) 1부. 끝.

	방재시설부장
주무관	김상용		환경시설과장	박희천		방재시설부장	05/02 박종웅
협조자
시행	방재시설부-2598	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/
전화	02)3708-8782	/전송	02)3708-8756	/	kimsy2405@seoul.go.kr	/	대시민공개