문서번호	자연생태과-7474
결재일자	2014.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태복원팀장	자연생태과장
이영일		안수연	05/02 김재경
협조

산골고개 녹지연결로 공사현장 점검 결과 보고

2014. 5.

푸른도시국

(자연생태과)

산골고개 녹지연결로 공사현장 점검 결과 보고

은평구 녹번동 산1-18일대, 산골고개 녹지 연결로 조성 공사현장을 점검하고 결과를 보고드림

□ 사업개요

○ 위    치 : 산골고개(녹번동 산1-18 일대)

○ 규    모 : 폭13.6m, 연장55m

○ 사업내용 : 생태교량, 산책로, 수목 식재 등

○ 사업기간 : ‘13. 12. 10 ~ ‘14. 10.5(설계 : ‘12. 4. 9 ~ ‘13. 10. 30)

○ 사 업 비 : 5,159백만원(도급액 : 4,045백만원)

○ 도 급 자 : ㈜ 신안건설산업  대표 우 경 선

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2014. 5. 1

○ 점 검 자 : 총 4명

- 푸른도시국장, 자연생태과장, 생태복원팀장, 담당(이영일)

○ 확인내용

- 공사 추진 현황 및 공사장 안전관리 사항

- 책임감리(상주 및 비상주) 근무 상황 점검

□ 점검결과

○ 공사 추진 현황 및 공사장 안전관리 현황

- 가교설치를 위한 기초 콘크리트 타설 진행중(4개소중 3개소 완료)

* 1개소는 구조물 하부 상수도 맨홀 별도 구조안전 진단 후 시행예정.

○ 책임감리(상주 및 비상주) 근무 현황

- 상주책임감리 근무중이나 공사장 전체 내용 파악 부족

* 책임감리 : ㈜용마엔지니어링 토목시공기술사 이창호

- 토목구조 등 주요 공종 작업시 기술감리(비상주 감리) 미참여

□ 조치의견(시행 기관 조치사항)

○ 공사 안전시공 및 현장 관리 철저

- 우기대비 공사장 및 사면 안전관리 철저(특히 숏크리트 절개 사면 특별관리 필요)

- 공사 현장 주변 정돈 및 안전관리 철저

- 공사로 인한 교통흐름 방해 및 통행 시민 불편 최소화

- 공사 공정표, 비상연락망, 비상․응급 장비 등 현장사무실 비치

○ 책임 및 상주감리원 계약 규정 이행 철저

- 감리원의 적정자격 보유 여부 및 상주 이행상태 확인 철저

- 감리업무 수행계획서 및 감리원 배치 계획서, 상주, 기술지원감리원 지정신고서와 감리원경력확인서, 감리원 조직 구성내용과 감리원별 투입기간 등 검토 철저

- 감리원의 계약 규정 성실 수행여부 및 근태 수시 지도점검 철저

(특히 주요공종 기술감리 참여 이행여부 지도점검 철저)

○ 기타사항

- 공사관리관 업무 체크리스트 작성 및 상시 지도점검 체계 유지

- 건설공사 안전관리 지침 제4조 규정에 따른 따른 안전점검 실시 철저

- 서울시 도시안전과-10158(2014, 4, 29)의 우기 대비 공사장 및 재난취약시설 안전관리 철저(공문서 첨부)

붙   임 : 1. 공사장 현황사진 1부.

2. 공사장 안전점검 관련 방침서 사본 등 3부. 끝.

공사장 현황 사진

(2014. 5. 1)

가설가교 기초 콘크리트 설치를 위해 숏크리트 일부 절개 (우기 대책 마련)	가설가교 기초 콘크리트 타설지역 지장물 (상수도관 및 맨홀 구조안전 진단 후 시행)

공사추진 상황 보고 (책임감리, 시공사, 발주청 관계자 참여)