문서번호	전시과-2073
결재일자	2014.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	전시과장	학예연구부장	경영지원부장
정수인	정명아	박현욱	대결 05/02 김소영
협 조
	경영지원부장		김소영
	총무과장		연규승
	시설과장		나용제
	교육대외협력과장		사종민
	유물관리과장		허대영
	보존과학과장		양필승

상설전시실 4존 ‘아파트’이전·설치

및 생활사 코너 보강 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014

전 시 과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

상설전시실 4존 ‘아파트’ 이전 설치 및 생활사 코너 보강 계획

‘아파트 인생’ 전시에 사용된 서초삼호아파트를 일괄로 상설전시실

4존에 이전·설치하여 1980년대 서울의 생활상을 보강

보편적인 주거형태인 아파트 생활문화를 통해 서울의 미시사 부분을

보완하여 다양하고 밀도있는 전시 콘텐츠 구성에 기여

1. 사업개요

사업기간	2014. 5. 6(수) ~ 2014. 5. 19(월)
공사장소	기획전시실 및 상설전시실 4존 (일부)
추진목적	․ 철거되는 아파트의 생활모습을 이전하여 보존 ․ 1980년대 보편적인 아파트 생활문화를 전시하여 상설전 시실 4존의 미시사 부분 보완
사업내용	'아파트 인생' 전에 전시된 서초삼호아파트 철거부재를 상설전시실 4존에 이전·설치 1970~80년대 기존 설치물의 이동 및 보완
소요예산	52,000천원

전시물 재활용	‘아파트 인생’ 전 서초삼호아파트 철거부재 재활용 아파트 내부 단층 연출 모형(1980년대 생활 코너에 설치) 수집된 생활재 전시 자료 등

2. 사업내용

01.	서초삼호아파트 이전 설치
	서초삼호아파트 내장재 및 생활재 이전, 설치 상설전시실 4존의 생활에 맞게 평면 일부를 수정하여 생활모습을 전시
02.	1980년대 전시 콘텐츠를 1970년대 부분과 통폐합
	1970~80년대 전시 그래픽 수정 보완 1970~80년대 생활문화 타워 유물교체 및 위치 이동 올림픽 깃발 이동 설치 등
03.	서초삼호아파트 리플렛 제작 등
	서초삼호아파트를 소개하는 개별 리플렛 제작 홈페이지, 상설전시실 리플렛 등 내용 수정, 보완

3. 추진일정

2014. 5. 6	관람시간 종료 후 통행제한 임시 가벽 설치
2014. 5. 7~8	전시자료 이동(기획전시실-> 상설전시실)
2014. 5. 9~10	서초삼호아파트 철거 및 4존 철거 공사
2014. 5. 11~18	아파트 이전 설치 공사 원고작성, 번역 및 그래픽 작업
2014. 5. 19	그래픽 공사 및 올림픽 깃발 이동 설치 유물 보완 설치 개관 준비 작업 등

※ 위 일정은 상황에 따라 변경될 수 있음

6. 예산집행계획

○ 소요예산 : 52,000천원

구 분	수 량	예 산 액 (단위 : 천원)	비 고
전시공사	1식	50,000	시설비
진열장 이동 설치, 리플렛 제작 등 기타 잡비	1식	2,000	사무관리비
총 계		52,000천원

○ 예산과목 : 상설전유지운영, 시설비 및 부대비, 시설비/ 일반관리비, 사무관리비

○ 예산집행

- 수의계약

※ 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제25조1항4호바목(대통령령제25140호; 2014.2.7.) : 해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립(시험가동을 포함한다) 또는 정비하는 경우

및 지방자치단체수의계약운영요령(행정안전부예규 제331호2010.10.26)

- 기타 운영비 : 500만원 이하 일상경비로 교부받아 신용카드 결재, 계좌입금

7. 협조사항

○ 총 무 과 : 예산 및 행정지원

○ 시 설 과 : 상설전시실 전기 및 조명 설치 지원, 홈페이지 게재 등

○ 교육대외협력과 : 디지털키오스크 안내 문구 설치

○ 유물관리과 : 전시대상유물 대출 협조

○ 보존과학과 : 전시대상유물 보존처리 및 전시실 온습도 유지

8. 성과지표

○ 고유-3 관람환경의 적정성

○ 고유-9 박물관전시회 운영 및 기획전시.

끝.