문서번호	방재시설부-2689
결재일자	2014.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
한종수		서관석	05/07 박종웅
협조

「용허리공원 빗물저류조 설치공사」

정산실정보고(저류조 및 유입관로 가시설) 검토

2014. 5.

도시기반시설본부

(방재시설부)

정산실정보고(저류조 및 유입관로 가시설) 검토

(용허리공원 빗물저류조 설치공사)

「용허리공원 빗물저류조 설치공사」시행 중 공사장 부지내 암발생으로 가시설공법 변경, 가시설공사 침수방지용 PE배수로 설치 및 서초대로 횡단부 지장물 저촉으로 시․종점부 종단부 조정 승인 건의 정산 실정보고에 대한 검토 보고 임.

[ 근거:잠원2감 2014-127호(2014.4.30.),토목부-5099호(2013.3.26)]

□ 공사개요

◦ 위    치 : 서울시 서초구 서초동 용허리공원 일대

◦ 규    모 : 빗물저류조 V=15,000㎥, L=237.8m(2.0×1.5@1)

◦ 공사기간 : '12.12.21 ~ '14. 5.30

◦ 총사업비 : 11,000백만원

□ 실정보고내용

◦ 실정보고 사유

-「용허리공원 빗물저류조 설치공사」시행중 공사장 부지내 암발생으로 가시설 공법 변경, 우기철 대비 저류조 가시설공사 침수예방으로 PE배수로 설치

- 유입관로 공사중 서초대로 횡단부 지장물로 유입관거 시․종점부 종단고 조정 및 가시설 공법 변경 정산 실정 보고 임.

◦ 승인사항

- 과도한 이설비 및 이설기간을 감안하여 종단고 조정 시행

․ 시점부 EL 10.02 m →  EL 8.52 m 로 1.5m 하향 조정 시행

․ 종점부 EL 8.52 m →  EL 7.95 m 로 0.57m 하향 조정 시행

- 설계서와 현장 지반 상이로 인한 변경사항은 공정관계 상 추후 실정보고

․ 암발생으로 Sheet Pile 시공이 불가하여 저류조 가시설 변경

․ 당초 : Sheet Pile → 변경 : Sheet Pile + H-Pile

․우기철 대비 가배수로 추가 설치

◦ 적용 단가 : 지하철본부 설계단가 및 낙찰율(85.496%) 적용

◦ 추가소요 예산 : 약 56,400천원 증액

◦ 감리단 검토의견

- 기 승인을 득한 사항으로 설계서를 보완하여 정산 처리함이 타당하다고  사료됨

□  조치의견

◦ 감리단 실정보고 내용을 검토한 바 가시설 변경(Sheet Pile → Sheet Pile+H-Pile)은 암발생으로 인한 불가피한 변경으로 사료되어 변경함이 타당하다고 판단되므로 기 승인된 사항과 같이 정산코자하며,

◦ 계약금액 10% 이상 증가로 인하여 계약심사과에 ‘설계변경 심사요청’을 하여야 하나 본 건은 안전행정부 예규 제74호(2014.2.5.) 3장5절1의바(이미 계약상대자와 협의하여 우선 시공을 한 설계변경으로 설계변경 심사의 실효성이 없는 경우)에 해당되어 본부 “설계변경소위원회”심의를 거쳐 설계변경 시 반영코자 함.

붙임 : 감리실정보고서 1부.  끝.