문서번호	환경보전과-1282
결재일자	2014.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	환경보전과장
김종찬	이정수	전결 05/07 代이정수
협 조

『2014년 월드컵공원 소규모 생물서식공간조성 실시설계용역』

준공기한 연기 검토 보고

서부공원녹지사업소

(환경보전과)

『2014년 월드컵공원 소규모 생물서식공간조성 실시설계용역』

준공기한 연기 검토 보고

우리사업소에서 시행 중인『2014년 월드컵공원 소규모 생물서식공간조성 실시설계용역』과 관련하여 효율적인 사업추진과 설계품질 향상을 위해 준공기한을 연기하고자 함.

용역 개요

용 역 명 : 2014년 월드컵공원 소규모 생물서식공간조성 실시설계용역

용역기간 : 2014.3.27. ~ 2014.5.7.

용역내용 : 실시설계

현황조사 및 분석

설계도서(설계도면, 내역서, 공사시방서, 공정표 등) 작성

공종별 상세설계도 작성 등

용 역 비 : 13,815,000원

도 급 자 : 한수그린텍(주) 대표 김성주

추진 현황

2014.2.11. : 사업 추진계획 수립

2014.2.20. : 기술용역 타당성 심사

2014.3.27. : 실시설계 용역 착수

2014.4.30. : 설계심의

준공기한 연기 검토

준공기한

당 초 : 2014.3.27. ~ 2014.5.7.

변 경 : 2014.3.27. ~ 2014.6.9.

준공기한 연기 사유

사업대상지 현황을 보다 세밀히 분석하고, 대상지에 적합한 소규모 생물서식공간 유형 재검토

연기사유 귀책소재 : 서울특별시 서부공원녹지사업소

지체상금 : 미부과

조치계획

준공기한을 2014.6.9.로 연기하여 설계품질 향상에 최선을 다하고자 함. 끝.