문서번호	시설과-1585
결재일자	2014.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
양지윤	홍순철	변규열	05/07 이춘희
협 조
	주무관		김승환

『보라매공원 남문화장실 등 2개소 리모델링공사』

민원 및 유지관리 관련 검토 보고

2014. 4.

동부공원녹지사업소

(시   설   과)

『보라매공원 남문화장실 등 2개소 리모델링공사』

민원 및 유지관리 관련 검토 보고

우리사업소에서 추진 중인 ‘보라매 무장애 친화공원 조성사업’ 관련「남문화장실 등 2개소 리모델링공사」와 관련하여 유지관리부서로부터 민원해소 및 유지관리 관련 의견이 제출되어 검토 보고 드림

Ⅰ		공사개요

○ 위    치 : 동작구 신대방동 여의대방로20길 33

○ 공사기간 : 2013. 12. 23  ~ 2014. 6. 20

○ 공사금액 : 337,345,940원

○ 도 급 자 : ㈜대명토건 대표 유남숙

○ 공사내용 : 남문화장실 등 2개소 리모델링공사

○ 감 독 처 : 시설관리공단 공사감독1처

Ⅱ		유지관리부서 요청 사항

○ 검토요청 내용(공원운영과 – 5431, 2014.4.21)

- 남문화장실 남자화장실 대변기수 증설(2개 →3개)

- 보관함 위치 조정(남자화장실 → 여자화장실)

○ 검토요청 사유

- 놀이터화장실의 남성용 변기수가 줄어 이용 불편 민원발생

- 남자화장실 내 청소도구함 배치로 여성 청소근로자의 잦은 출입으로 인한 남성이용자의 프라이버시 침해 민원 및 관리불편

Ⅲ		검토내용

○ 대·소변기 설치 현황(계획)

당 초	변 경
남자화장실 8개(대변기 3/소변기 5) 여자화장실 7개(대변기)	남자화장실 6개(대변기 2/소변기 4) 여자화장실 9개(대변기)

※ 리모델링 설계용역 진행 시 여성화장실의 대변기 수가 남성화장실 대·소변기 수의 1.5배로 설계

○ 조정(안)

유지관리부서 요청 내용대로 남자화장실 변기수 1개 증설, 청소도구실 위치 조정(남자화장실→여자화장실)할 경우 여자화장실 대변기 수가 1개 축소되어 남녀 대·소변기 수가 7(남):8(여)로 조정

Ⅲ		조치의견

○ 기 공사완료된 놀이터화장실을 이용하는 남성이용자들이 기존 대비 변기수가 줄어 불편 민원을 제기하고 있으며,

○ 보라매공원 놀이터화장실과 남문화장실 주변 팔각정 및 파고라의  노인 남성들의 이용빈도가 높아 인근 화장실 사용이 빈번하므로 공원 이용객 편의를 고려하여 남자화장실 기존 대변기 수를 유지하는 것이 바람직하다고 사료됨.  끝.

검토자  시설(건축) 7급   양 지 윤  (인)

공업(기계) 7급   김 승 환  (인)