문서번호	방재시설부-2661
결재일자	2014.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
한종수		서관석	05/07 박종웅
협조

「용허리공원 빗물저류조 설치공사」

정산실정보고(철근외부가공장 운영 정산 건) 검토

2014. 5.

도시기반시설본부

(방재시설부)

정산실정보고(철근외부가공장 운영 정산 건) 검토

(용허리공원 빗물저류조 설치공사)

「용허리공원 빗물저류조 설치공사」중 임시저류조 운영을 위한 일부 구조물 조기완료(저류조기초,벽체일부)와 현장부지 협소를 감안하여 철근가공장 운영 승인 건의 정산 실정보고에 대한 검토 보고임.

[ 근거:잠원2감 2014-065호(2014.2.20.), 토목부-10522호(2013.6.11.) ]

□ 공사개요

◦ 위    치 : 서울시 서초구 서초동 용허리공원 일대

◦ 규    모 : 빗물저류조 V=15,000㎥, L=237.8m(2.0×1.5@1)

◦ 공사기간 : '12.12.21 ~ '14. 5.30

◦ 총사업비 : 11,000백만원

□ 실정보고내용

◦ 실정보고 사유

-「용허리공원 빗물저류조 설치공사」시행 중 저류조 구조물 공사와 관련하여 기보고한 위치(경기 평택)에 철근가공장을 운영하고 그에따른 가공부재의 수량 정산이 필요한 실정 임.

◦ 승인사항

- 철근운반(구역화물 적용, 12톤, L=60km)

․ 서초동→외부가공장(58.8km), 외부가공장→현장(59.3km)

◦ 정산 현황

공 종	규 격	단위	수 량		증 ․ 감	비고
			당초	변경
운 반	공장 → 현장(L=14.0km)	톤	816.192	284.284	감 531.908
운 반	공장 → 가공장(L=58.8km) 가공장 → 공장(L=59.3km)	톤		531.908	증 531.908

◦ 적용 단가 : 구역화물 요금(12톤, L=60km) 및 낙찰율(85.496%) 적용

◦ 추가소요 예산 : 약 22,726천원 증액

◦ 감리단 검토의견

- 기 실정보고 승인사항에 대한 사항으로 실 가공한 부재수량을 정산 처리함이 타당 함.

□  조치의견

◦ 감리단 실정보고 내용과 같이 기 승인된 사항에 대한 정산건은 타당한 것으로  판단되며,

◦ 계약금액 10% 이상 증가로 인하여 계약심사과에 ‘설계변경 심사요청’을 하여야 하나 본 건은 안전행정부 예규 제74호(2014.2.5.) 3장5절1의바(이미 계약상대자와 협의하여 우선 시공을 한 설계변경으로 설계변경 심사의 실효성이 없는 경우)에 해당되어 본부 “설계변경소위원회”심의를 거쳐 설계변경 시 반영코자 함.

붙임 : 감리실정보고서 1부.  끝.