투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)	공사감독1처장,공사감독3처장
제목	공사 조정내용 통보(보라매공원 남문화장실 등 2개소 리모델링공사)

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 공단에서 공사감독 업무 수행 중인『보라매공원 남문화장실 등 2개소 리모델링공사』관련하여 현재 공사시행 중인 “남문화장실”에 대한 공사 조정내용을 아래와 같이 통보하오니 감독업무 수행에 철저를 기하시기 바랍니다.

○ 조정내용

- 남자화장실 대변기 수 증설(2개 → 3개)

- 청소도구함 위치 조정(남자화장실 → 여자화장실)

※ 평면변경 사항은 현장협의 시행, 추후 설계변경 반영할 것.

○ 조정사유

- 공원관리부서(공원운영과)로부터 민원 해소 및 유지관리 관련 검토 요청.

끝.

	동부공원녹지사업소장
주무관	양지윤		시설팀장	홍순철		시설과장	05/07 변규열
협조자	주무관	김승환
시행	시설과-1590	(		)	접수		(		)
우	156-010	서울 동작구 여의대방로 20길 33(신대방동 395)	/
전화	02-2181-1158	/전송	02-2181-1169	/	ideal2009@seoul.go.kr	/	대시민공개