시 행	설비부-4906
시행일자
수 신 자	내부결재

결재	주무관	건축설비과장	설비부장
	정광식	조예환	05/08 박기형

설계변경 자문회의(소위원회) 심의결과(제3차)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			설비부-3447호				요청부서		열빛총괄과		심의일자		2014.05.07
공 사 명			장충체육관 리모델링 기계설비공사
공 사 개 요			공사규모				- 건축 연면적 11,429㎡(지하2층/지상3층) - 냉·난방설비공사, 위생설비공사, 소방설비공사 1식
			공사기간				2012.07.04.~2014.08.31
			감 리 사				㈜펨코엔지니어링(소방), ㈜아이티엠코프레이션(기계)
			설 계 사				㈜삼인이에스
			시 공 사				㈜수정이엔씨
심의요청사유							3천만원 이상 5억원 미만 변경(증액) 발생
<설계변경 사유> ○ 물가 변동에 의한 계약금액 조정(제1회)
원설계자 의견 ○ 물가변동에 관한 사항으로 반영함이 타당함
심의결과		원안가결			붙임 심의위원 심의의견서
심의결과 조치					· 심의요청 원안으로 설계변경 시행 및 심의의견 보완 조치
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위원장			이흥복				간 사		정광식
	위 원			이호기				위 원		김학범
	위 원			김경남				위 원		박경철