문서번호	설비부-4892
결재일자	2014.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
지장환		권오식	05/08 박기형
협조
	주무관		김은덕

『구리암사대교 건설 전기공사』

가로등공사 실정보고 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 05

「구리암사대교 건설 전기공사」

가로등공사 실정보고 검토보고

우리 본부에서 시행하는 「구리암사대교 건설 전기공사」와 관련 아천 및 암사IC 구간의 가로등 기초타입 변경과 구리방면 M도로에 가로등 및 보행등 추가설치에 따른 실정보고 내용을 검토한 결과임.

1		공사개요

○ 공 사 명 : 구리암사대교 건설 전기공사

○ 공사기간 : 2010. 07. 28 ~ 2014. 12. 31

○ 도 급 액 : 금 5,351,980천원

○ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링 외 1

○ 시 공 사 : ㈜모범전설(대표 오세창)

2		관련근거

○ 구리시 건설과-6404(`14.04.11) : 구리암사대교 접속도로 가로등 설비 협의

○ 설비부-4161(`14.04.18) : 구리방면 가로등설비 관련 회의결과 보고

○ 암사감리2014-275(`14.04.30) : 구리암사대교 가로등공사 설계변경 실정보고

3		검토내용

○ 변경사유

- 아천 및 암사 IC 램프 구조물 중 일부가 토공으로 변경돼 가로등 기초타입 변경

(구조물기초 → 중공기초)

- 구리방면 M도로 육갑문 진입로가 신설돼 해당구간 가로등 추가

- 구리시청 요청에 의거 구리방면 M도로 가로등에 보행등 설치

○ 주요변경사항

(단위 : 천원)

구 분	당 초		변 경		금액증·감 (직접공사비)
가 로 등 기 초 변 경	구조물 앙카볼트	146본	콘크리트 중공기초	146본	+ 20,872
가로등 및 보행등 추 가 설 치	-		가로등 MH 250W	6본	+ 21,885
	-		보행등 CDM 70W	20개

○ 공사비 증․감내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	금액증·감
도급공사비	직접공사비	973,661,347	999,839,529	+ 26,178,182
	제 경 비	99,269,199	99,800,835	+ 531,636
	공 급 가 액	1,072,930,546	1,099,640,364	+ 26,709,818
	부가가치세	107,293,054	109,964,036	+ 2,670,982
	계	1,180,223,600	1,209,604,400	+ 29,380,800
관급자재비		-	17,421,600	+ 17,421,600
총 공사비		1,180,223,600	1,227,026,000	+ 46,802,400

○ 감리단 의견

- 아천 및 암사 IC 램프의 구조물 중 일부가 토공으로 변경됨에 따라 가로등        기초를 콘트리트 중공기초로 시공하는 것이 타당하며,

- M도로 육갑문 진입로 신설에 따른 가로등 6본 추가설치 및 구리시청             요구사항인 보행등 20개 추가공사는 도서 검토결과 적정

4		조치의견

○ 책임감리단의 검토 내용이 적정한 것으로 판단되므로 실정보고 사항을        승인하고, 추후 설계변경 시 계약금액에 반영토록 통보하고자 함.

첨 부 : 감리단공문 및 실정보고 내역서 각 1부. 끝.