투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	‘두모교 내진성능개선공사’ 설계변경 시행

1. 교량보수과-2796호(2014.5.2)호 및 신명감 2014-333호(2014.5.7)와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 ‘두모교 내진성능개선공사(2013 이월)에 대해 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

ㅇ 사 업 명 : 두모교 내진성능개선공사

ㅇ 시 행 자 : 매일종합건설(주) 외 1

ㅇ 사업기간 : 연장 (도급비 변경없음)

구 분	당 초	변 경	비 고
사업기간	2013. 4.29 ~ 2014. 5.23	2013. 4.29 ~ 2014. 8.31	준공기한 연장
도 급 비	6,290,580천원	6,290,580천원	변경 없음

ㅇ 설계변경사유 : 공사중 안전사고방지 및 시설물 안전을 위한 일부공종 수량 변경

- 수량변동 내역

공 종	단위	수 량		증 ․ 감	변동 사유
		당 초	변 경
안전점검통로 설치	M	154.4	266.3	증) 111.9	시설안전점검 사각지역 해소 교량받침 교체작업공간 확보
기존 점검통로 보수보강	개소	81	66	증) 15	공사중 추락등, 안전사고방지
전단키 철근배근 수량	톤	8.9	7.3	감) 1.6	철근배근 방법 변경
점검통로 앵커해체, 설치	개소		106	증) 106	공사중 안전사고 방지 위해 저촉 지장물 재설치
바지선 사용료	개월	8	4	감) 4	실사용 기간으로 정산

ㅇ 예산과목 : 도로시설관리, 도로시설물운영,  도로시설물 내진성능개선, 시설비 및

부대비, 시설비 (205-401-01)

따로붙임 : 1) 변경내역서(2회) 및 책임감리 검토의견서

2) 준공기한 연장 보고서

3) 설계내역변경 보고서.  끝.

주무관	정상모		교량보수과장	代정상모		서부도로사업소장	05/08 김만수
협조자	주무관	홍용현		관리단속과장	김병철		계약1팀장	김점선
시행	교량보수과-2890	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울시 마포구 가양대로 203	/
전화	300-8451	/전송	300-8459	/	akma@seoul.go.kr	/	대시민공개