투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	토목부장
(경유)
제목	설계변경소위원회 심의 의뢰

우리부에서 시행중인「용허리공원 빗물저류조 설치공사」와 관련 “철근외부가공 운영정산 건” 외 3건에 대하여 아래와 같이「설계변경 소위원회」심의를 의뢰하오니 조치하여  주시기 바랍니다.

가. 설계변경 소위원회 심의내용

【단위 : 천원】

공사명	심의내용	공사비			비고
		당초	변경	증ㆍ감
용허리공원 빗물저류조 설치공사	① 철근외부가공 수량 정산	15,444	38,170	증)22,726
	② 지반보강 및 쉬트파일 인발	33,330	134,970	증) 101,640
	③ 지하매설물 조사	-	29,629	증) 29,629
	④ 저류조 및 유입관로 가시설	2,909,240	2,965,640	증 56,400

※ 지하매설물 조사 건은 30백만원 미만이나 계약심사에 포함되는 사항이라 심의 의뢰 하는     것임.

붙임 : 설계변경심의 요청서 각1 부. 끝.

	방재시설부장
주무관	한종수		치수시설과장	서관석		방재시설부장	05/08 박종웅
협조자
시행	방재시설부-2753	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 별관2동 2층 (서소문동 37)	/
전화	02 - 3708 - 8772	/전송	02 - 3708 - 8756	/	ggabii@seoul.go.kr	/	대시민공개