부 장		05/08 代김성호		과 장	권일순	심사자	성원배	설계자	이경훈		설 계	심 사		결 재
											2014년 05월 08일	2014년 05월 08일
설 계 변 경 내 역 서 (6차 1회)
□ 용역명 : 서울지하철9호선 2단계 916공구 건설공사 전면책임감리용역 (6차)
	구 분					금 액							비 고
						당 초				변 경
	총 용 역 비					1,311,000,000				1,326,000,000			증) 15,000,000
	용역비		공 급 가 액			1,191,818,182				1,205,454,546			13,636,364
			부 가 가 치 세			119,181,818				120,545,454			1,363,636
			계			1,311,000,000				1,326,000,000			증) 15,000,000
용역개요 1. 대상용역 : 서울지하철9호선2단계 916공구 건설공사 2. 공사개요 : 총연장 1,140m 3. 과업내용 : 서울지하철9호선2단계 916공구 건설공사 입찰도서 검토 서울지하철9호선2단계 916공구 건설공사 전면책임감리(토목,안전,건축,기계설비,전기분야) 4. 과업기간 : 변경없음 (2013.03.19. ~ 2014.05.14.) 5. 변경사항 : 안전분야 감리원 추가 투입(2014.03.21.~2014.05.14.)에 따른 감리용역비 조정