문서번호	하천관리과-7615
결재일자	2014.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	청계천관리팀장	하천관리과장		물관리정책관
이병우	지세진	한유석		05/08 정만근
협 조
	자연생태과장		김재경
	역사도심관리과장		이정화
	역사문화재과장		황요한

「수표교길 연결 주변정비 방안」

타당성조사 및 기본계획 용역 추진계획

2014. 04.   .

도시안전실

(하천관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

「수표교길 연결 주변정비 방안」

타당성조사 및 기본계획 용역 추진계획

청계천시민위원회에서 건의한『수표교 원위치 중건』실현 가능성을  검증하기 위한「타당성조사 및 기본계획 용역」을 추진코자 함

Ⅰ		추진배경 및 필요성

□ 추진배경

○ 청계천 개선·보완 선언(청계천 투어시 ‘12. 2. 28)

- 청계천의 역사성 및 생태성 개선·보완을 위해 청계천시민위원회 구성·운영

○ 청계천시민위원회 구성·논의(‘12. 3 ~ ‘14. 1월)

- 청계천시민위원회(전체회의11회, 3개 분과회의 각8회)에서 개선보완 방안논의

○ 청계천 개선보완 학술연구 용역추진(‘13. 3 ~ ‘14. 2월)

- 청계천 역사성 및 자연생태성 회복(청계천시민위원회 주관, 서울연구원 시행)

○ 청계천 역사성 및 자연생태성 회복 건의(청계천시민위원회, ‘14. 3. 12)

- 청계천시민위원장이 기자설명회를 통해 청계천 개선보완 필요사항을 서울시에 건의

□ 용역의 필요성

○ 2005년 청계천 복원당시 청계천의 제원(폭, 깊이)과 1958년 복개공사시

장충단공원에 이건된 수표교 제원(연장, 교각길이) 차이로 원위치 복원이

어려워 장기과제로 남겨 놓은 상태임

○ 청계천 복원 완료 후 8년경과 시점에서 청계천시민위원회 활동을 통하여 수표교 원위치 중건을 시민의 관점에서 공개적으로 건의한 상태이므로 현 상태에서 기존자료와 도시계획 변경사항등 종합하여 실현가능성 검토필요

○ 단순 수표교 복원이 아닌 인접 근린공원 조성과 장교12지구 도심재개발

등과 연계하여 단절된 수표로 연결방안(종로~청계천~을지로) 검토필요

Ⅱ		대상지 현황

□ 개 요

○ 위    치 : 수표로(종로 ~ 청계천 ~ 을지로)

○ 구간 현황 : 500m

- 수표로 연장 500m(종로구 구간 250m, 중구 구간 227m, 청계천 구간 23m)

- 수표교 미복원(원위치에서 약40m 하류에 유사형태 목교로 임시 재현)

○ 조사검토 면적 : 50,000㎡ (폭 100m, 연장 500m 기준)

○ 문화재 결정고시

- 수표교지 : 국가사적 제461호 고시

- 장충단공원 이건 수표교 : 서울시유형문화재 제18호 고시

- 세종대왕기념관 이건 수표 : 국가보물 제838호 고시

○ 구간인접 도시계획 결정 및 재개발 진행

- 수표 지구단위계획 결정고시(2005. 8), 종로2·3가 지구단위계획 결정고시(2005. 8)

※ 중심지 미관지구 지정 및 근린공원 결정(수표동 11-9 외2필지)

- 장교도시환경정비 구역지정(‘73. 9), 장교12지구 도시환경정비사업 추진중

※ 중심지 미관지구 지정으로 12m 후퇴후 건축 및 일부 기반시설(도로) 제공

Ⅲ		기술용역 추진계획

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 「수표로 연결 정비방안」 타당성조사 및 기본계획 용역

○ 위    치 : 수표로(종로 ~ 청계천 ~ 을지로)

- 도로구간(종로구 구간 250m, 중구 구간 227m), 청계천 구간(23m)

○ 용역기간 : 착수일로부터 240일

□ 용역내용

○ 수표교지 및 역사유적의 조사‧분석

- 수표교 원위치 잔존기초 위치 조사분석, 옛 준천사 위치 조사분석 등

○ 공간적 연결성 회복을 위한 디자인 기본구상

- 수표로 연결 기본디자인 구상(수표교 중건, 하천단면 및 도로선형, 전통문화거리, 등)

○ 인접 근린공원 조성을 통한 공간적 연계성 확보를 위해 필요한 사항 등

- 근린공원 조성계획, 장교12지구 도시환경정비사업에서 제공하는 도로부지 활용

○ 사업 추진을 위한 투융자심사 자료작성 등

- 경제성 및 재무분석, 투자계획 구상

□ 추진계획

○ 추진방법 : 타당성조사 및 기본계획 용역 시행

○ 계약방법  : 일반경쟁 입찰

○ ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 제9조 및 같은 법 시행령 제13조,  같은 법 시행규칙 제14조에 의한 요건을 갖추고,  아래 ‘가’, ‘나’ 분야별 자격 및 실적을 모두 갖춘 업체 (단독 또는 공동 참여 가능)

가. ｢문화재 수리등에 관한 법률｣ 제14조 및 동법 시행령 제12조, 시행규칙에 의한 문화재 수리업자중 실측 설계업으로 등록을 필한 업체

나. 입찰공고일 기준 3년 이내 단일 건 3천만원 이상 규모의 디자인(시각, 산업, 서비스, 커뮤니티, 환경 디자인분야) 실적이 있는 업체

○ 소요예산(249백만원) : 붙임 산출내역서 참조

- 청계천 개선보완 사업 설계비(550,000천원)중 일부사용

○ 예산과목 : 도시안전실 하천관리과, 치수 및 하천 관리, 하천 복원 및 정비,

청계천 개선보완 사업, 시설비(100-401-01), 설계비

Ⅳ		향후 추진계획

○ 2014. 4월 말 : 타당성조사 및 기본계획 용역방침

○ 2014. 5월 초 : 기술용역 타당성심사 및 발주 공고의뢰

○ 2014. 5월 말 : 계약(일반경쟁)

○ 2014. 6 ~ 2015. 2월  : 타당성조사 및 기본계획 용역 시행

- 용역 진행 단계별 청계천시민위원회 보고 : 착수보고, 중간보고, 최종보고

- 용역과정에서 관계기관(부서) 협의 : 문화재청, 서울시 관련부서

○ 20154. 2월 이후 : 기본 및 실시설계 용역 추진 여부 등 검토

※ 타당성조사 및 기본계획 용역에서 사업 타당성 입증시 기본 및 실시설계 등

후속업무 추진

붙임 : 1) 과업내용서(안)

2) 산출내역서 1부. 끝.