투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	동부간선도로확장공사(3공구) 책임감리원 김구환 귀하
(경유)
제목	실정보고 승인

1. 동삼감 제2014-58(2014.04.29.)호와 관련입니다

2. 창동진출로 L형옹벽 배면 성토고 조정 및 종점부 웹카메라 설치등에 대한 실정보고에 대해 승인하오니 향후 설계변시 반영하여 주시고 호안공사시 다짐등 품질관리에 만전을 기하여 시공하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 검토보고서 1부. 끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
주무관							장종환			교량건설과장					05/09 이동훈
협조자
시행			토목부-8847									(						)		접수											(						)
우	120-715					서울 서대문구 충정로3가 동아일보사건물 50															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2576						/전송			3708-2599					/	hjj0128@seoul.go.kr												/	대시민공개