다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰

우리과에서 시행중인 ‘한강상 교량 연결램프 구조개선(강남지역) 기본 및 실시설계용역’에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용역명 : 한강상 교량 연결램프 구조개선(강남지역) 기본 및 실시설계용역

2. 계약자 : ㈜대한콘설탄트 외 3

3. 준공기한 연기내역

- 당초 : 2014. 5. 15

- 변경 : 2014. 10. 31

4. 귀책사유 : 서울특별시

따로 붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기방침서 1부.

3. 용역계약 변경합의서 1부.  끝.

	도로계획과장
전문관	정용훈		도로정책팀장	임춘근		도로계획과장	05/09 형태경
협조자
시행	도로계획과-5947	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110 도로계획과 10층	/
전화	02)2133-8067	/전송	02)2133-0763	/	hoon0916@seoul.go.kr	/	대시민공개