공사감독일지
소방행정과-4484		감독공무원		팀장		과장
･ 공사명 : 세곡119안전센터 신축공사		김재원	신효인	오주형		03/26 최홍균
･ 기 간 : 2018. 3. 19. ~ 3. 23(28주)
일자	확인사항		비 고(근로자 218명)
’18.3.19	① 직영2명 현장청소 ② 조적5명 적벽돌 쌓기 ③ 수장6명 2층 천정텍스시공 ④ 타일7명 세탁실 및 1층 내벽 모노타일 시공 ⑤ 잡철3명 외벽하지철물 ⑥ 토목4명 옹벽 거푸집보강 및 콘크리트 타설 ⑦ 기계3명 기계실 배수펌프 설치 ⑧ 외단열5명 외벽보드 메시작업 ⑨ 도장2명 1층 벽체 퍼티작업				현장근로자 37명
’18.3.20	① 직영2명 1~2층 청소 ② 수장6명 2~3층 천정텍스시공 ③ 타일7명 1층 모모타일 시공 및 각층 벽체 줄눈시공 ④ 도장2명 각층 퍼티작업 및 수성페인트 시공 ⑤ 유리4명 유리끼우기 ⑥ 외단열5명 외벽 메시작업, 마감재 스타코 반입 ⑦ 잡철11명 외벽 알루미늄 시트판 부착 및 외부판넬 설치 ⑧ 기계3명 지층 배수펌프 설치 ⑨ 토목5명 옹벽 거푸집해체				현장근로자 45명
’18.3.21	① 직영4명 2~3층 청소 및 대기실 바닥 단열재 깔기 ② 수장6명 1~3층 천정텍스 및 화장실 몰딩작업 ③ 타일5명 외벽 모노타일 시공 ④ 조적6명 적벽돌 마무리공사 ⑤ 유리4명 후레싱 및 실리콘 작업 ⑥ 창호2명 1층 방풍실 힌지작업 ⑦ 잡철11명 외벽 후레싱 작업 ⑧ 외부판넬 설치 ⑨ 외단열5명 스타코 뿜칠하기 토목5명 옹벽 형틀해체 및 정리 장비1대(06W) 옹벽주변 되뫼우기 및 가설훤스 철거				현장근로자 49명
’18.3.22	① 직영4명 청소 및 단열재 깔기 ② 수장6명 1층 천정텍스시공 ③ 외단열5명 외벽스타코 뿜칠 ④ 미장2명 외벽 견출작업 ⑤ 타일5명 외벽 모노타일 시공 ⑥ 잡철10명 외벽후레싱 및 판넬 설치 ⑦ 지열2명 수압시험 ⑧ 자동제어2명 지층 자동제어 분전반 설치 ⑨ 도장2명 각층 퍼티수성도장 ⑩ 토목1명 보도블럭 경계석 반입 및 휀스주위 터파기 ⑪덕트3명 3층 덕트설치				현장근로자 42명
’18.3.23	① 직영4명 청소 및 단열재 깔기 ② 미장7명 차고바닥 폴리싱 작업 ③ 외벽견출 내벽 바닥미장, 벽체, 먹메김 ④ 수장6명 1층 천정텍스시공, 3층 주방천정 SMC천정시공 ⑤ 타일7명 내벽 타일주방줄눈 및 1층 외벽 모노타일 시공 ⑥ 외단열3명 외벽스타코뿜칠 ⑦ 잡철11명 외부판넬설치, 체력단련장 지붕 징크하지철물 ⑧ 유리3명 체력단련장 유리끼우기 및 후레싱 실리콘작업 ⑨ 비계3명 RPP판넬 및 게이트 해체정리 ⑩ 토목1명 토사반입 및 장비06W 장비투입				현장근로자 45명