투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	북한산성 대성문 여장 고증자료 보완 요청에 대한 회신 (북한산성 대성문 해체보수공사)

1. 문화재청 수리기술과-1145(2018.03.16.)호와 관련입니다.

2.『북한산성 대성문 해체·보수공사』는 2014년 10월~2015년 8월 실시한 안전진단결과에 따라 2016년 2월 우리 시 주관부서인 한양도성도감에서 전면 해체보수(복원) 계획수립 및 우리본부에 설계 및 공사 의뢰하여 같은 해 9월 귀 청의 설계승인(석여장 복원 포함)을 득하고 현재까지 보수(복원) 공사 중에 있습니다.(※ 2018년 8월 준공예정)

3. 금년 2월 설계변경 승인과정 중 제시된 조선후기 추정 사진[전벽돌 또는 막돌여장 추정(노르베르트 베버, 1911년)]은 최근에 발견된 것이 아닌 본 공사 설계 이전에 공개된 사진이며, 우리본부는 귀 청에서 부여한 설계변경 승인조건에 따라 대성문 외 북한산성 4개 성문에 대한 현황조사 결과 및 타 기관(부서)에 의뢰하여 회신된 자료를 건축부-3393(2018.03.12.)호로 제출하였습니다.

4. 따라서, 위 대호로 요청하신 추가의 고증자료 및 조사는 고도의 전문성(고고학적·학술적·장시간 소요)이 요구되는 사안으로 우리본부(공사부서) 업무범위 밖이며, 필히 시행하여야 한다면 문화재 전문기관인 귀 청에서 직접 추진 또는 우리 시 주관부서인 한양도성도감과 협의하시어 전문적 고증 및 조사를 실시하고 그 결과에 따라 여장 정비 방향이 결정될 수 있도록 조치하여 주시기 바라며, 필요하다면 별도의 사업(설계 및 시공)으로 추진될 수 있도록 적극 검토하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 북한산성 대성문 여장고증 관련 협의(공문)  1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	문화재청장(수리기술과장),서 울 특 별 시 장(한양도성도감과장)
★주무관	이진영		문화시설과장	윤용훈		건축부장	03/26 임인구
협조자
시행	건축부-4004	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 13층(무교동, 프리미어플레이스빌딩)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2630	/전송	02)3708-2659	/	2012111728@seoul.go.kr	/	부분공개(6)