투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	강남구 논현로 419 PMK빌딩 9층(역삼동) (주)펨코엔지니어링건축사사무소 대표 귀하
(경유)
제목	건설사업관리기술자 배치계획 변경 승인 알림(시립중랑노인전문요양원 증축공사)

1. 시정 발전을 위한 관심과 협조에 감사드리며, PC18-218(2018. 3. 22.)호와 관련입니다.

2. *******************************************************************************************************************************************

○ 변경 승인내용

가. 건설사업관리기술자 배치계획 변경

구분	분야	변경 전 배치계획	변경 후 배치계획	비 고
상주	건축	2018. 5. 19.～ 2019. 7. 17.	2018. 3. 26.～ 2019. 7. 17.	인·월수 변동없음
	토목	2018. 2. 3.～ 2018. 6. 5. 2019. 4. 3.～ 2019. 7. 2.	2018. 2. 3.～ 2018. 6. 5. 2019. 3. 15.～ 2019. 6. 30.
	조경	2019. 3. 15.~ 2019. 7. 2.	2019. 3. 15.～ 2019. 5. 30.

나. 건축 건설사업관리기술자 변경

구분	분야	변경 전 배치계획			변경 후 배치계획			비 고
		성명	등급	생년월일	성명	등급	생년월일
상주	건축	정계형	고급	1977. 1.29.	방유석	특급	1967. 2.26.	배치계획조정
배치계획		배치 전 변경			2018. 3. 26.～2019. 7. 17.

다. 용역계약 내용 변경

구분	계약기간			용역금액(단위: 천원)			비고
	당초	변경	비고	당초	변경	비고
총 차	2017.12.18.-2019.7.17.	2017.12.18.-2019.7.17.	변경없음	753,635.7	753,635.7	변경없음	배치계획변경으로 기간조정
1차용역	2017.12.18. -2018.7.31.	2017.12.18. -2018.7.13.	감18일	196,000.0	196,000.0	변경없음

****

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	문성재		의료시설과장	이형재		건축부장	전결 03/26 임인구
협조자	주무관	조문석		주무관	송석범
시행	건축부-4052	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어 플레이스빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2616	/전송	02-3708-2659	/	msj2061@seoul.go.kr	/	부분공개(5)