문서번호	물재생시설과-4179
결재일자	2018.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	물재생운영팀장	물재생시설과장	물순환안전국장
김병오	정훈모	이인근	03/26 한제현

준공기한 연기 보고

(차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 용역)

2018. 3

물순환안전국

(물재생시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

준공기한 연기 보고

(차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 용역)

자문회의 의견 반영, 설계경제성 검토 및 건설기술심의에 필요한 소요기간을 감안하여 용역 준공기한을 연기하고자 함

Ⅰ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 용역

□ 계 약 자 : ㈜ 이산 외 2개사

□ 계약금액 : 1,464,700천원

□ 용역기간 : 2016. 4.15. ~ 2018. 3. 31

□ 주요과업내용

○ 차집관로 기본 및 실시설계(1.5Q 미만) 11.2Km , 기타

○ 현장 조사 및 측량 후 조사자료 분석 및 지표 설정

○  경제성 등 타당성 분석 등

Ⅱ		추 진 현 황

□ ’16.  4 : 용역 계약 · 착수

□ ’16.  6 : 용역 착수 보고

□ ’16. 12 : 자문회의(1차)

□ ’17.  3 : 투자심사 시행(개봉유수지)

□ ’17. 10 : 2차 기성(540백만원)

□ ’18.  2 : 자문회의(2차)

Ⅲ		준공기한 연기

□ 연기사유

○ 자문회의시(2.27) 제시된 유관기관(부서) 협의내용 검토반영, 설계VE 예산확보 후(‘18.3.9) 설계VE 시행(3.19~4.5), 건설기술심의에 필요한 소요기간 감안하여 준공기한을 연기하고자 함

□ 연기내용

구 분	당 초	변 경
기 간	’16. 4. 20. ~ ’18. 3. 31	’16. 4. 20. ~ ’18. 6. 30

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ		조 치 계 획

□ 용역수행 계약상대자와 준공연기에 대한 변경계약을 체결하고자함

Ⅴ		조 치 계 획

□ ‘18.  3 : 변경계약(준공기한 연기) 의뢰(재무과)

□ ‘18.  4 : 설계경제성 검토

□ ‘18.  5 : 건설기술심의

□ ‘18.  6 : 용역 준공

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 설계경제성(VE) 검토 시행계획 보고서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.