투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시지방경찰청장(교통관리과장)
(경유)
제목	공사중 교통소통대책 기간연장 요청[천호대로 연장 중앙버스전용차로 설치공사]

1. 시정 발전에 적극 협조하여 주시는 귀 청에 감사드립니다.

2. 서울시 교통운영과-4692호(2018.03.23.)와 관련입니다.

3. 우리 본부에서 시행중인‘천호대로 연장 중앙버스전용차로 설치공사’에 따른 공사중 교통소통대책 기간연장을 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 천호대로 연장 중앙버스전용차로 설치공사

나. 위    치 : 광진구 아차산역(중곡동 삼거리) ~ 광장사거리

다. 공사내용 : 중앙버스전용차로 2.6km, 중앙 정류소 5개소 등

라. 시 공 사 : 해동건설(주), 대보건설(주)

마. 공사기간 연장 및 사유

- 당초 : 2017.10.10. ~ 2017.12.20

- 변경 : 2017.10.10. ~ 2018.04.30

- 사유 : 현장 여건 등 공정계획 변경에 따라 공사기간 연기

붙 임 : 1. 관련공문 1부.

2. 교통소통대책 요약보고서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	권순환		교량건설과장	박용택		토목부장	전결 03/26 김영수
협조자
시행	토목부-4974	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96) 프리미어플레이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2577	/전송	3708-2599	/	ksh1216@seoul.go.kr	/	대시민공개