문서번호	급수설비과-2897
보존기간	년
결재일자	2014.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관	급수설비과장	급수부장
김형준	김인환	05/09 이상홍
협 조

민간위탁 사무 지도점검 결과보고

2014. 5. 9

급   수   부

(급수설비과)

상수도공사 (급수,누수복구) 시공감독업무 위탁용역

민간위탁 사무 지도․점검 결과

서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한조례 제16조(지도감독)에 의거 상수도공사(급수,누수) 시공감독 용역에 대한 계약내용 이행실태 및 감독대행자 운영 등에 관하여 지도․점검하고 그 결과를 보고드림

□ 점검개요

○ 대상사무 : 상수도공사(급수,누수복구) 시공감독업무 위탁용역

○ 점검일자 : 2014. 5. 8 (목)

○ 점 검 자 : 김 형 준

○ 점검방법 : 용역 수행업체 각각 방문

- ㈜ 이준엔지니어링 : 서울 광진구 천호대로 694 홍지빌딩 5층

- ㈜ 건양엔지니어링 : 서울 광진구 긴고랑로 40길 24  102호

○ 주요 점검사항

- 계약내용 이행 관련사항

- 감독대행자 운영 및 교육에 관한 사항

- 비상연락체계 및 안전관리장비 실태

- 최근3년간 사고이력, 재정상황 (‘14.4.21 시장 지시사항)

□ 점검결과 및 조치

○ 계약내용 이행, 감독자 운영관리 및 교육시행 등 전반적으로 양호

○ 현장 입회감독 및 안전관리, 청렴교육 강화지시

붙 임 : 민간위탁사무 지도․점검 결과 1부. 끝.

민간위탁 사무 지도․점검 결과

□ 대상사무명 : 상수도공사(급수, 누수복구) 시공감독업무 위탁용역

□ 위탁기관 현황

○ 위탁기관명 : (주)이준엔지니어링 외 1개사

○ 대표자 성명 : 이방열

○ 위탁사무 근로자 현황 : 총 61명{(주)이준 44, (주)건양 17}

○ 위탁기관 주요사업 : 상수도시설 조사 등 용역사업

□ 지도점검 결과

(대상기간:‘14.1.1~4.27)

구 분	점검내용	점검결과	조치사항
계약내용 이행사항	감독대행자 근무지침 비치여부	- 비 치
	현장 감독업무 수행실태	- 입회감독 및 사후점검 ․ 급수공사 입회 99.5% ․ 포장복구 입회 89.9%	가급적 현장입회 감독토록 지시
	감독대행 실적 보고 준수여부	- 사업소 : 일일보고 - 본 부 : 주간보고
감독자 운영관리	사업소별 감독자 배치실태	- 공사건수에 맞게 배치 (사업소별 4~10인)
	감독자 공백 시 업무수행 실태	- 대체인력 투입(23회)
	공사건수가 많은 현장 감독실태	- 사업소내, 사업소간 상호지원 ․ 사업소내 136회 ․ 사업소간 25회
	감독자 복무관리 실태	- 기술지원감독 대행자 4명 순회 기술지도
교육사항	품질향상 교육 이수실태	- 전원 이수	하반기 교육대상도 이수하도록 지시
	자체교육 시행실태	- 1회 ․ 안전관리 ․ 품질관리 ․ 청렴 관련 등	안전관리 및 청렴 관련 교육 강화 지시

구 분	점검내용	점검결과	조치사항
재정 및 안전	기업 신용평가 등급 확인서	㈜이준엔지니어링 BBB- ㈜건양엔지니어링 B+
	안전관리 장비 현황	- 산소농도측정기에 대한 실제사용유무 와 기기 점검	기기에 대한 지속적인 교정작업을 시행하도록 할 것
	용역관련 비상연락망 유지실태	- 기존의 연락망을 활용 하고 있으며, 카카오톡을 통하여 전직원에 대한 1일 점검을 시행하고 있음	별도 비상연락망을 만들어 비상시 활용할 것