＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	서울숲-뚝도정수센터 간 교환부지 공원조성 사업 설계변경 시행

『서울숲-뚝도정수센터 간 교환부지 공원조성 사업』을 아래와 같이 설계변경 시행하여 유지관리 효율 제고 및 사업시행에 만전을 기하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 서울숲-뚝도정수센터 간 교환부지 공원조성 공사

2. 위    치 : 서울시 성동구 성수동1가 1동 685번지 일대

3. 공사기간 :　2017. 10. 19. ~ 2018. 03. 30.

4. 도 급 자 : ㈜현우그린 대표 남상준

5. 도 급 비 : 525,492,000원(변경없음)

6. 변경내용 : 내역변경

7. 설계변경 사유 : 관리부서 요청사항 반영

8. 예산과목 : 최고품질의아리수생산, 깨끗하고안전한아리수생산, 정수장시설유지보수,

수선유지교체비, 수선유지비(뚝도정수센터서울숲간교환부지공원조성공사)

붙 임 : 1.　현장실정 보고서 1부.

2. 설계내역서(변경) 1부.  끝.

주무관	한광수		생산관리과장	한희선		생산부장	03/26 유성종
협조자
시행	생산관리과-3174	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3146-1319	/		/	대시민공개