문서번호	도로보수과-3906
결재일자	2014.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
오재섭		05/09 이석재
협조

포장도로 평탄성 확보를 위한

불량맨홀정비 추진계획 보고

2014. 5

북부도로사업소

도로보수과

포장도로 평탄성 확보를 위한

불량맨홀정비 추진계획 보고

맨홀 뚜껑 침하, 주변부 파손 등 불량맨홀은 포장도로 운전자들에게 가장 많은 불편요인이 되고 있어 조속한 정비를 위해 전수조사 실시 및 정비추진계획을 보고드림

Ⅰ		관련 근거

□ 2012.10.17 : 특별시도(차도)상 맨홀 관리기관 변경(업무이관) 계획

(행정2부시장방침 제336호 : 도로관리과-18349호)

□ 2014. 4.11 : 불량맨홀 조사 및 정비계획(도로관리과-5779호)

Ⅱ		맨홀 관리현황

□ 관리대상(총괄 : 자치구별)

구분	총계	종로구	성북구	강북구	도봉구	노원구
총계	14,242	3,080	3,594	2,414	1,970	3,184

□ 맨홀종류별 현황

구분	개소	상수도	하수도	통신	전기	도시가스	지역난방	기타
총계	14,242	4,229	3,594	3,520	1,381	732	33	753

Ⅲ		그간 추진현황

□  2013. 2 ~ 5 : 시도상 맨홀 관리 인수․인계(종로구 등 5개구)

□ 2013. 5.  ~ 2014. 2 : 2013년 불량맨홀 정비공사

□ 정비완료 : 757개소

□  2014. 2.  ~ 2014. 4 : 2013년 불량맨홀 정비비 부과 및 징수

□ 부과(관리 기관별) : 76건, 693백만원(2014. 4.21현재)

□ 징수(관리 기관별) : 41건, 297백만원,  체납 : 35건, 396백만원

□  2014. 4.11 : 2014년 불량맨홀 정비공사 착공

□ 2014. 4. 7 ~ 4.27  2014년 불량맨홀 전수조사

≪2014년 불량맨홀 전수조사 결과≫

맨홀종류	계	뚜껑부 파손		맨홀 주변 파손	맨홀 침하	비고
		뚜껑과 받침 사이 단차	소음진동
총계	1,382	18	43	389	932
상수도	287	2	20	75	190
하수도	370	6	0	115	249
통신	499	9	18	139	333
전기	154	1	1	47	105
도시가스	23	0	3	2	18
지역난방	4	0	0	2	2
소화전	36	0	1	8	27
기타 매몰 등	9	0	0	1	8

뚜껑부 파손		맨홀 주변파손	맨홀 침하
뚜껑과 받침 사이 단차	소음진동

≪파손 유형별 현황≫

Ⅳ		정비 방향

□ 차량통행이 많고, 내외국인의 방문이 많은 시내 근접 지역 주요노선 및 간선도로 우선으로 정비공사 시행

□ 자치구별 우선순위 : 종로구 ⇒ 성북구 ⇒ 강북구 ⇒ 도봉구 ⇒ 노원구

□ 기존도로 정비공사(굴착복구, 정비공사 등) 시행시 병행 추진

□ 주변파손, 침하 등으로 평탄성 확보가 시급한 불량맨홀

□ 정비방법

□ 불량맨홀 정비흐름도

업무 내용	맨홀정비 계획수립	→	불량맨홀 전수조사통보	→	불량맨홀에 대한 합동조사	→	불량맨홀에 대한 정비요청	→	도로관리청에 보수 위임된 불량맨홀 보수
기관	도로관리청		도로관리청→ 맨홀관리기관		도 로 관 리 청 맨홀관리기관		맨홀관리기관→ 도로관리청		도로관리청

※ 맨홀주변의 파손으로 안전사고가 우려되거나 긴급을 요하는 사항에 대하여는 일정과 관계없이 수시 보수 조치

※ 맨홀인상 만으로 노면의 평탄성 확보가 어려운 표층의 조절이 필요한 부분은 직영반 또는 긴급복구업체(연간단가)로 하여금 평삭작업 및 아스팔트표층 시공 후 맨홀인상으로 평탄성 확보

Ⅴ		세부추진 계획

□ 년도별 정비 추진계획

구분	계	2013년	2014년	2015년	2016년 이후
소요예산	2,250	700	600	700	250
정비규모	2,139	757	554	600	228
추진 계획률(%)	100	35	26	28	11

(단위 : 백만원, 개소)

□ 2014년도 불량맨홀 정비계획

【개   요】

□ 기   간 : 2014. 4. 11 ~ 2015. 2.28

□ 정비규모 : 554개소

□ 사 업 비 : 600백만원

□ 계약업체 : 삼서건설(주) 대표 나남열

【추진일정】

□ 2014. 4. ~ 2014. 5. 23 : 전수조사 완료 및 작업지시(1차)

□ 2014. 5. ~ 2015. 2.    : 공사시행 및 준공

≪정비 우선순위≫

1. 재난대비 도로순찰 적출분

2. 차량통행이 많고, 내외국인의 방문이 많은 시내 근접 지역 불량맨홀

3. 맨홀주변 파손이 심한 불량맨홀

□ 2014. 8  ~ 2015. 2 : 정비비 부과 및 징수

□ 2015년도 이후 불량맨홀 정비계획

□ 서울시(도로관리과) 소요예산 편성결과에 따라 년차적 정비시행

Ⅵ		행정 사항

□ 2015년이후 불량맨홀 정비 예산 확보(도로관리과)

□ 정비실적 및 정비비 징수 관리

□ 정비실적 보고(주간, 월간, 분기별) ⇒ 도로관리과

□ 맨홀관리 기관별 자체정비 실적 분기별 수합 보고

□ 불량맨홀 정비비 부과 및 징수(기성 준공시마다) ⇒ 맨홀관리 기관

□ 맨홀 관리기관에 통보 및 정비 협조

□ 뚜껑단차 등 소음발생 불량맨홀은 맨홀관리관에서 자체정비 협조 요청

□ 맨홀 철개․뚜껑 구매 및 제공 협조 요청 ⇒ 맨홀관리 기관

□ 하자관리 철저 시행 ⇒ 2013년 정비 완료분부터

첨부 : 불량맨홀 전수 조사현황 1부.  끝.