문서번호	토목부-8952
결재일자	2014.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
박상철		최광무	05/12 노우성
협조

지하지장물로 인한 가시설 일부 변경 검토 보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5

서울특별시도시기반시설본부

(토 목 부)

지하지장물로 인한 가시설 일부 변경 검토 보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

본 공사 시행중 강일삼거리에 우수암거 신설을 위해 가시설 설치를 위해 굴차결과 지하지장물이 저촉되어 일부 구간의 공법을 변경(TS판넬 설치 → H-PILE+토류판 공법)하여  설치코자 검토하고 보고 드리는 사항임

※ 관련근거 : 고덕감리 2014-141호(2014. 5. 7.)

■ 공사개요

◦ 공 사 명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사

◦ 공사규모 : 도로개설 B=31.5m, L=1,880m

◦ 공사기간 : 2012. 8. 2 ～ 2014.12.31

◦ 도 급 비 : 18,161백만원

◦ 시 공 사 : ㈜신성건설 대표

◦ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링 대표

■ 현황 및 문제점

◦ 고덕천 제방 부근의 가시설은 TS판넬로 설계되어 있음(붙임 실정보고 참고)

◦ 줄파기 결과 TS판넬 설치구간에 지장물이 저촉되는(L=34m)되어 지장물 매달기 안전시공을 위해 TS판넬을 H-PILE+토류판으로 변경 시공코자 함

■ 시공사 의견

◦ TS판넬 구간 지하매설물 매달기 등을 안전하게 설치할 수 있는 H-Pile+토류벽 공법으로 변경시공하고 증액 공사비는 시공사 부담으로 설치코자 하는 의견임

■ 감리단 검토의견

◦ 공사 착수를 위한 지장물 조사결과 TS판넬 가시설 시공 구간은 산재되어 있는 지장물 보호를 위한 관매달기 등 공사의 어려움이 예상됨.

◦ 지하매설물 밀집지역인 교통섬 주변의 가시설을 H-PILE+토류판으로 변경하여 시공하는 것이 안전성 및 시공성 측면에서 유리함

◦ 공사비 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초		변 경		증 감
	수량(m)	금액(천원)	수량(m)	금액(천원)	수량(m)	금액(천원)
TS판넬	110	100,337	76	67,766	감 34m	감)32,571
H-PILE+토류판	4	6,460	38	54,431	증 34m	증)47,971
계					-	증)15,400

◦ 추가 공사비는 시공사가 본 설계를 시행한 주체로서 현장여건 변동이 발생 하지 않았고, 시공의 효율성 등을 고려한 변경 사항임으로 시공사 부담 조건으로 승인코자 함

■ 조치 의견

◦ 안전하고 품질시공을 위해 책임감리원 검토의견과 같이 추가 공사비는 시공사 부담으로 승인하고 추후 공사비 감액 요인이 발생하면 설계 변경 정산 처리코자함

붙임 : 1) 책임감리원 검토의견서 1부.

2) 시공사 관련 공문 1부.  끝.