문서번호	총무과-12710
결재일자	2014.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		별관운영팀장	총무과장
김광현		배창호	05/12 오형철
협 조
	주무관			이문주

서소문청사 전기설비 사용전검사

계획 보고

2014. 5.

별관운영팀

서소문청사 전기설비 사용전검사 계획 보고

서소문청사 1동 전기 수용설비의 노후시설물을 교체하고 전기설비의 이상유·무를 확인하기 위한 사용전 검사를 실시하여 청사내 안정적인 전력공급에 만전을 기하고함.

관련규정

❍ 사용전검사 : 전기사업법 제63조 및 시행규칙 제31조 제5항

❍ 안전진단(사용전검사)

- 자가용 전기설비를 교체 작업완료 후, 설비의 이상유무를 검사항목 등

세부기준을 정하여 전기설비의 안전성을 확보하기위한 검사

검사대상

❍ 수용설비 : 특고압VCB 4대

- 판넬명 :　HV-4, HV-5, HV-6, HV-7

검사기관 : 한국전기안전공사 서울지역본부

주요 진단내용

❍ 교체설비의 적합성 여부

❍ 차단기 동작성능 시험

❍ BUS-BAR의 모선과 차단기의 연결부위 적합성 검사

❍ 계전기 SETTING값 설정 및 동작시험 등.

세부 추진계획

❍ 차단기 교체 및 사용전 검사

- 2014. 5. 17(토) 08:00 ~  : 서소문청사 1,3동 정전 후 설비교체

- 2014. 5. 18(일) 15:00 ~ 17:00 : 사용전 검사(한국전기안전공사)

※ 교체공사 일정에 따라 정전시간 변동 있음.

업무담당자 지정

❍ 지방공업주사 이문주 외 전기실 5명

❍ 담당자 업무내용

- 업무담당자 : 검사에 따른 타부서 및 유관기관과 협의 등 총괄

- 안전관리자 : 검사자 안내, 기술지원 및 전기안전관리

- 전기실직원 : 수․배전반 기기청소, 볼트 조임 및 승강기 설비 상태 점검

행정사항

❍ 업무 불편 최소화를 위해 야간 및 휴일에 설비교체 및 검사

❍ 장시간 정전에 따른  직원들의 주말출근 자제(공지사항 안내)

따로붙임 1) 정전시 주요설비 전원공급 및 작업내용(순서) 계획 1부

2) 교체공사 예정공정표 1부  끝.