투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	서서울호수공원 산책로정비공사 배수로 및 스틸그레이팅 구매변경 의뢰

『서서울호수공원 산책로정비공사』관급자재에 대하여 아래와 같이 구매변경 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명 : 서서울호수공원 산책로 정비공사

나. 품명 및 변경내용

연번	물품 식별번호	품 명	규 격	단위	수 량		납품기한		비고
					변경전	변경후	변경전	변경후
1	21641231	배수로	철근콘크리트용배수로관, 대명콘크리트, DMC200, 200×200×2000×70mm, 측구수로관	본	130	150	2014.5.10	2014.7.1
2	21228149	스틸 그레이팅	스틸그레이팅, 태흥그레이팅, TH0019, 995×300×50×5×3mm, 뚜껑	개	260	290	2014.5.10	2014.7.1

다. 계 약 자 :

- 배수로 : 주식회사 대명콘크리트

- 스틸그레이팅 : ㈜태흥그레이팅

라. 변경사유 : 현장실측에 따른 수량변경과 공사일정 변경에 따른 납품기한 연장이 필요함.  끝.

	시설과장
주무관	이석중		주무관	오재영		시설과장	05/12 한성현
협조자
시행	시설과-2277	(		)	접수		(		)
우	121-850	서울 마포구 월드컵로 243-60(성산동 390-1)	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화		/전송	300-5569	/		/	대시민공개