투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	건설정보관리시스템 유지관리 및 고도화사업 월간보고('14.4월)

1. ‘14 건설정보관리시스템 유지관리 및 기능고도화 계획(2013.12.31, 본부장

방침)과 관련입니다.

2. 건설정보관리시스템(One-PMIS)과 건설알림이서비스 등에 대한 유지관리 및 기능고도화 용역을 추진중인 바,‘14.4월 실적과 5월 계획을 보고합니다.

가. 사 업 명 : ‘14 건설정보관리시스템 유지관리 및 기능 고도화사업

나. 사업기간 : ‘14.3.7 ~ ‘15.3.6 (12개월)

다. 계약금액 : 409백만원

라. 계약업체 : ㈜보림정보시스템

마. 실적 및 계획 (※ 공정율 : 계획 20.69%/ 실적 19.87%)

구 분	내 용
‘14.4월 실적	○ 신규개발사항 화면 설계 - 업무관리시스템(전자문서)과 문서유통&LDAP연계 - 사업단계.수행실적평가(2단계), 이력관리시스템 - 건설현장안전점검통합관리시스템 - 국토부 키스콘 정보 활용 ○ 건설소식지 생성.발송 절차 1차 개선 완료 ○ 기존기능 보완개발 - 사업개요 관리, 공정보고방법 간소화 화면설계 - 사업자 등록절차 간소화 화면설계 - 웹카메라 관련 화면설계 - 게시판기능관련 화면설계 ○ 원격지원 : IT콤플렉스 건립공사 외 87건 ○ One-PMIS 사용자 실습교육 실시 : ‘14.4.25 2회 (88명)
‘14.5월 계획	○ 신규개발사항 화면및DB설계 - 업무관리시스템(전자문서)과 문서유통&LDAP연계 - 사업단계.수행실적평가(2단계), 이력관리시스템 - 건설현장안전점검통합관리시스템 - 국토부 키스콘 정보 활용 - 건설관련 업무지침 관리 및 공유 - 업무추진현황 책자 기초 제작 ○ 기존보완개발(사업개요, 공정관리, 자료관리, 게시판등) - 공정보고(장/단기사업) 방법 간소화 기능구현 ( 5.30 한) - 사업자(계약업체정보) 등록절차 간소화 기능구현 ( 5.30 한) - 새주소 우편번호 검색 개선 DB설계, 기능구현현 ( 5.30 한) - 건설알림이 GIS 내 정보표기, 검색속도개선 화면설계 ( 5.16 한) - 모수관리 DB 설계 ( 5.30 한) - 게시판기능 개선 DB 설계 및 기능구현 ( 5.30 한) - 데이터 정합성 화면설계 ( 5.16 한) - 권한관리, 메인메뉴, 총괄관리모드 화면설계 ( 5.09 한) - 공사별 관리상태 평가 메뉴 추가, 결과서 공개 설계 (5.20 한) - 자치구별 맞춤건설알림이서비스 기능분석 및 설계 (5.30 한) ○ 사용자 교육 실시 : ‘14.5.22.23 (예정)

붙    임 : 1. ‘14.4월 월간 공정 보고(갑지/을지) 1부

2. ‘14.4월 One-PMIS 기능보완 및 오류수정 내역 1부.

3. 월별 용역사업 보안점검결과서 1부. 끝.

주무관	지명희		건설정보관리과장	이현숙		건설총괄부장	05/12 강홍기
협조자
시행	건설총괄부-8490	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2383	/전송	02-3708-2327	/	jimh@seoul.go.kr	/	대시민공개