문서번호	배수과-3083
결재일자	2014.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	배수과장		급수부장
전동근	박기범		05/12 이상홍
협 조

『직결급수 전환 불가주택』

소형물탱크 철거 및 직결급수 전환 실적 보고

2014. 5. 9(금)   .

상수도사업본부

(급 수 부)

『직결급수 전환 불가주택』

소형물탱크 철거 및 직결급수 전환 실적 보고

직결급수 전환불가능 주택 『소형물탱크 철거 및 직결급수 전환』 4월까지의 추진 실적을 보고 드림.

□ 사업개요

○ 사업대상 : 2,069개소

○ 사업기간 : ’14년 1월 ~  ’14년 12월

○ 사 업 비 : 12억원

□ 추진실적

(단위:개소)

구 분				계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
물탱크 철거 및 직결 급수 전환	2014년	계획		2,069	118	119	79	57	268	708	534	186
		1월 ~ 4월	목표	524	30	30	22	14	68	176	138	46
			실적	705	37	34	23	12	92	251	140	116
			달성율 (%)	134.5	123.3	113.3	104.5	85.7	135.3	142.6	101.4	252.2
	4월	목표		262	15	15	11	7	34	88	69	23
		실적		252	18	16	19	3	38	45	78	35
		달성율 (%)		96.2	120	106.7	172.7	42.9	111.8	51.1	113	152.2

□ 향후계획

○ 2014년 4월까지 추진목표 달성율은 134.5%(목표 523개소, 실적 705개소)이나, 하반기 조기 달성을 위해 수도사업소 담당자 회의를 개최하여 관노후 주택, 주민 직결급수 반대 주택 등 사례별 추진내용 및 달성 방안을 모색코자 함. 끝.