투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	(주)천일 대표 김석환 귀하,(주)한국해외기술공사 대표 이길용귀하, 북일종합건설(주) 대표 이충무귀하
(경유)
제목	공사추진 보고회 개최 결과 통보

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다

2. 토목부-8968(2014. 5.12.)호와 관련입니다.

3. 우리시와 귀 사간 계약하여 시행중인(전면책임감리용역, 재설계용역,  시설공사)『율곡로  창경궁앞 도로구조개선공사』에 대한 공사추진 보고회 개최 결과를 아래와 같이 통보하오니 보완조치 등 사후조치가 필요한 사항에 대해서는 조치하시고, 그 결과를 2014. 5.21.(수)까지 우리부에 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 설계변경

- 회의결과(설계변경)를 면밀히 검토 후 보완하여 설계변경 적정성 여부에 대해 감리업체의 확인을 받아 제출[(주)천일]

- 보완설계 내용의 적정성 여부에 대해 기술지원팀 등의 협조를 받아 검토후 그 결과를 우리부에 제출[한국해외기술공사(주)]

○ 공사추진

- 창경궁 기존담장 내부에 대한 문화재 지표조사 사전 협의에 따른  실정보고[한국해외기술공사(주)]

- 구조물 시공전 시공측량을 철저히 실시하여 재시공 하는 사례가   없도록 조치[한국해외기술공사(주), 북일종합건설(주)]

- 가시설 정밀안전점검 시행 및 공사 추진계획 대로 시공 될 수 있도록 조치[한국해외기술공사(주), 북일종합건설(주)]

※ 가시설 설치시기가 2년이 경과되었으므로 건설기술관리법에의거 정밀안전진단 시행

⟹ 기술지원감리원 등으로 T/F팀을 구성 운영하여 현장관리 철저

보완 실시설계 지연으로 인한 공정만회 대책 강구

⟹ 감리업체(시공사)에서 제출한 공사 추진계획 대로 공사시행 철저

붙임 : 공사추진 보고회 개최 결과 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박천용		광역도로과장	최광무		토목부장	05/13 노우성
협조자
시행	토목부-9022	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2558	/전송	02-3708-2599	/	park8370@seoul.go.kr	/	대시민공개