다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 세무종합시스템 운영 및 유지보수 주간보고(08주)

2014년 세무종합시스템 운영 및 유지보수사업과 관련하여 8주차 주간업무 처리 현황을 아래와 같이 보고드립니다.

아   래 -

○ 추진기간 : 2014. 5. 7 ~ 2014. 5. 9.

○ 추진사항

- 추가 및 보완개발 사항

구분	금주실적 (14.5.7~5.9)		차주계획 (14.5.12~5.16)		누적
	진행	완료	진행	완료	배포	전체
추가개발	5	0	4	1	0	24
보완개발	3	2	3	1	2	34

- 운영 및 유지보수 사항

구분	전주 (14.5.7~5.9)			금주 (14.5.12~5.16)			누적
	접수	진행	완료	접수	진행	완료	미완료	완료	전체
부과	10	10	8	5	9	6	9	72	81
징수	13	3	12	6	3	6	3	79	82
공통기타	4	11	8	0	6	5	6	37	43

- 지방소득세 부과·징수프로그램 개발사항

구분	분석		설계		개발		테스트		전체
	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적
양도소득	95	93	-	-	-	-	-	-	23.75	23.25
종합소득	79	79	-	-	-	-	-	-	19.75	19.75
특별징수	95	93	-	-	-	-	-	-	23.75	23.25
법인소득	79	79	-	-	-	-	-	-	19.75	19.75

붙임 : 1. 주간업무 현황보고(08주차). 1부.

2. 추진현황표. 1부.  끝.

주무관	김의중		세무정보화팀장	김천억		세무과장	05/13 김근수
협조자
시행	세무과-10711	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 9층	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3408	/전송	02-2133-1034	/	wj4382@seoul.go.kr	/	부분공개(5)
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다