문서번호	시설관리과-10917
결재일자	2014.5.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	소장
김대용		이시우	05/13 정운진
협 조
	주무관			이철구

장기계속 단가계약 발주계획 (긴급누수복구공사 및 건설폐기물처리용역)

2014. 5.

동부수도사업소

(시설관리과)

장기계속 단가계약 발주계획

(긴급누수복구공사 및 건설폐기물처리용역)

본 공사 건은 우리사업소 관내 누수발생시 신속하게 현장에 출동하여 긴급 누수복구를 시행하는 공사로 기 계약된 계약업체의 계약기간이 2014년 6월 30일 완료됨에 따라 향후 원활한 누수복구를 위하여 장기계속단가계약공사로 발주 코자 함.

□ 공사현황

연번	공 사 명	공사기간	도급자 (대표자)	계약금액(원)	비고
1	2013년 동부 관내 긴급누수복구공사	2013.7.11 ~ 2014.6.30	(주)흥일기공 백영숙	2,850,987,710
2	2013년 동부 관내 누수복구 건설폐기물 처리용역	2013.7.23 ~ 2014.6.30	(주)우성산업개발 황병갑	262,714,000

□ 보고내용

○ 본 공사는 우리사업소 관내 누수발생시 신속하게 현장에 출동하여 긴급누수복구하는        공사로 기 계약된 계약업체의 계약기간이 2014년 6월 30일 만료됨에 따라 향후        원활한 누수복구공사 유지를 위하여 장기계속단가계약공사 발주가 필요 함.

- 예산집행 현황

(단위 : 원)

구 분 (공사명)	계약금액	집 행 액			잔 액
		기 집행액	정산 예정액	계
2013년 동부 관내 긴급누수복구공사	2,850,987,710	2,002,044,000	848,943,710	2,850,987,710	-
2013년 동부 관내 누수복구 건설폐기물 처리용역	262,714,000	96,679,000	166,035,000	262,714,000	-

□ 조치계획

○ 상기와 같은 사항으로 현재 진행중인 2013년 동부 관내 긴급누수복구공사 및 2013년       동부 관내 누수복구 건설폐기물처리용역은 2014년 6월중 최종 준공처리하고,

○ 돌발적인 누수시 긴급누수복구공사를 시행하여 상수도 시설물 유지관리를 위하여        아래와 같이 발주하고자 합니다.

【 발주 및 계약방법 】

※ 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제24조(장기계속계약)                 및 동 법 시행령(장기계속계약 및 계속비계약)

○ 장기계속단가계약 시행 방법

- 총 예정물량은 장기계속계약 절차에 따라 2015년 6월 30일까지의 전체 물량으로         하되 2014년 12월 31일까지의 1차년 예정물량과 2015년 6월 30일까지의 2차년         예정물량을 합산 산출하고 각 연도별 총 소요예산을 구분하여 발주

○ 2015년도 1월부터 6월까지 예정량은 익년도 예산을 확보하여 집행

【 발주 금액 결정 】

○ 3년치 시공물량의 평균치를 감안하여 발주금액 결정(붙임 내역서 참조)

○ 발주예정 물량                                           (단위 : 백만원)

연번	공 사 명	공사기간	총공사규모		1차년도		2차년도
			물량	금액	물량	금액	물량	금액
1	2014년 동부 관내 긴급누수복구공사	착공일 ~ 2015.6.30	- 누수복구 : D=13~2,400mm 1,300개소 - 불용 및 노후관정비 : D=13~300mm L=1,690m	3,120	- 누수복구 : D=13~2,400mm 520개소 - 불용 및 노후관정비 : D=13~300mm L=670m	1,248	- 누수복구 : D=13~2,400mm 780개소 - 불용 및 노후관정비 : D=13~300mm L=1,020m	1,872
2	2014년 동부 관내 누수복구 건설폐기물 처리용역	착공일 ~ 2015.6.30	- 건설폐기물 운반 : 4,189㎥ - 건설폐기물 처리 : 7,496톤	211	- 건설폐기물 운반 : 1,670㎥ - 건설폐기물 처리 : 2,990톤	84	- 건설폐기물 운반 : 2,519㎥ - 건설폐기물 처리 : 4,506톤	127

【 계약기간 】

○ 계약일로부터 2015. 6. 30일까지

- 2014년 계약기간 : 계약일로부터 2014. 12. 31일까지

- 2015년 계약기간 : 2015. 1. 1 ~ 2015. 6. 30일까지

□ 세부추진 내역

○ 설  계 : 2014. 5.

○ 발  주 : 2014. 5.

○ 착  공 : 2014. 6.

붙임 : 발주 설계내역서 각 1부. 끝.