문서번호	공공재생과-3465
결재일자	2016.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	사업관리팀장	공공재생과장		재생정책기획관
배현경	안중욱	홍선기		04/11 강맹훈
협 조
	주무관		김성만

설계공모 관리용역 준공보고

[ 남산 예장자락 재생사업 ]

2016.4

도시재생본부

(공공재생과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

설계공모 관리용역 준공보고

[ 남산 예장자락 재생사업 ]

「예장자락 남산공원 재생사업 설계공모 관리」용역에 대한 준공검사 및 준공처리 보고.

Ⅰ				용역개요		‘

○ 용 역 명 : 예장자락 남산공원 재생사업 설계공모 관리용역

○ 용역기간 : ’15.11.2. ~’16.4.2

○ 계약금액 : 129,712,000원

○ 수행기관 : 한밭대학교 산학협력단

○ 과업내용 : 기획·홍보·진행·관리·운영· 등 사전기획 및 설계공모 전반적 사항 추진

- 공모관련 질의응답 대응, 참가등록 및 작품접수 관리

- 공모관리 운영위원회 운영

- 설계공모 지침서 작성

- 공모시행 및 심사 진원(심사위원 섭외/일정관리, 심사위원회 진행, 시상식, 전시회 개최)

- 작품집 및 보고서 제작 등

- 홍보 및 홈페이지 구축·운영

Ⅱ				추진경위 및 과업성과		‘

○ ’15.11. 2	용역계약 및 착수

○ ’15.12.17	설계공모 공고(서공고 제2015-2222호)

○ ’15.12.21	현장설명회 개최(유스호스텔)

○ ’16. 2.17	작품심사 및 당선작 선정

○ ’16. 2.26	시상식 개최

○ ’16. 3.30	용역 준공계 제출

Ⅲ				준공검사 결과		‘

▢ 주요 변경내용 ※계약금액 변경없음.

○ 전문위원수당 미지급 및 심사위원수당 감소

○ 트로피 제작사양 변경, 전시 도슨트 운영요청에 따른 비용 추가

○ 심사일정 변경관련 포스터 재인쇄에 따른 비용 추가

○ 설계공모 홈페이지 개편 활용에 따른 비용 추가

▢ 성과품

○ 종합보고서 100부, 작품집 200부, 데이터 수록 CD 1건

▢ 검토결과

○ 본 용역에 대한 감독 및 준공검사 결과 과업지시서 내용 및 발주처 요구사항에 따라 과업이 완료 및 추진하였기에 용역 준공처리하고자 함.

붙임 : 성과품 사진 1부. 끝.