투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재(화재수신기) 납품기한 변경 의뢰(장충체육관 리모델링 전기공사)

1. JCR14-124호(2014.5.12.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인 『장충체육관 리모델링 전기공사』 관급자재(화재수신기)에 대하여 아래와 같이 납품기한을 변경 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경내용

납품 요구번호	품명 (물품식별번호)	당 초			변 경			비고
		수량	금액	납품기한	수량	금액	납품기한
12-13-2-66434-00	화재수신기 (22164172)	1식	30,589,000	`14.5.31.	1식	30,589,000	`14.8.31.	납기변경

나. 변경사유 : 선행공정 지연으로 관급자재 소요시기 미도래

다. 지체상금 부과 여부 : 미부과

따로붙임 : 책임감리단 검토 보고서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	김은덕		열빛총괄과장	권오식		설비부장	05/13 박기형
협조자	경리과장	최영미
시행	설비부-5069	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/	http://smih.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8602	/전송	02-3708-8659	/	keund9@seoul.o.kr	/	부분공개