문서번호	물재생계획과-6041
결재일자	2014.5.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	하수계획팀장	물재생계획과장		물관리정책관
윤혜선	이도우	이진용		05/13 정만근
협 조
	하수관리팀장		최승각
	하수정비팀장		심형보
	하수정보팀장		이승원

침투형 빗물받이 설치방법 개선 연구 계획

(공무원직접수행 학술용역)

2014.  5.

도 시 안 전 실

(물재생계획과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

침투형 빗물받이 설치방법 개선 연구 계획

현재 우리시에서 침수해소 및 물순환회복을 목표로 도입, 확대설치하고 있는 침투형 빗물받이의 최적화된 설계기법 연구, 제시함으로써 침수해소효과를 극대화하고, 도시지역 대표 수방시설물로써의 역할을 부여코자 함

Ⅰ		추진 배경

□ 관로 개선 일변도에서 벗어나 작은 시설물로 효율적인 침수해소 방안 마련 필요

❍ 2020 하수도정비기본계획 결과, 매년 300km이상 하수관로 정비 필요

: 3,705km, 약 4,000억원 이상의 막대한 예산 소요

□ 하수관로로 유입되는 1차 하수도 시설인 빗물받이를 이용한 침수해소 도모

❍ ‘13년까지 빗물유입시설(일반형, 연속형, 침투형 등) 7,270개소 설치

※ 침투형 빗물받이의 경우, 786개소 설치로 약 430톤의 저류공간 확보

□ 침수해소 및 물환경개선 공동 목표 실현 극대화를 위한 설계 기준 마련 필요

❍ 침투형 빗물받이 월류턱 높이, 침투통 크기 등 구체적인 기준 미비

Ⅱ		연구 개요

□ 과 제 명 : 침투형 빗물받이 설치방법 개선 연구

□ 연구기간 : 2014.5.~ 2014.10

관련지침 연구분석		해외사례 및 설치사례 조사		하수도 시뮬레이션 모의		침투형 빗물받이 최적 설계구조 연구		결과정리 및 보고서 작성
5월~6.15		6.15~7.15		7.15~8.31		9.1~9.30		10.1~10.31

□ 연구원 T/F 구성(5인)

❍ 연구팀장 : 하수계획팀장 이도우

❍ 연 구 원 : 김재승 · 윤혜선 전문관, 이원영·김춘호 주무관

□ 연구내용

❍ 침투형 빗물받이 침수저감 영향인자도출 및 최적 범위 연구

❍ CSOs 저감을 위한 침투형 빗물받이 구조에 대한 연구

❍ 침투형 빗물받이 최적 설치 구조 개발

□ 소요예산 : 5,000천원

Ⅲ		연구수행 계획

□ 침투형 시설 설계기준 수립를 위한 기초자료 조사

- 빗물받이 설계 기법 조사

- 국내 외 침투형 시설 설계 기법 및 가이드라인 조사

- 침투형 시설 효과 검증에 관한 국 내외 관련자료 조사

- 침투형 빗물받이 매커니즘의 주요 영향인자에 대한 문헌 조사

□ 국내·외 사례 조사

- 독일 베를린, 프랑크프루트, 일본 도쿄, 요코하마, 카와사키 등 사례조사

- 아산-탕정지구 등 국내 침투형 시설설치 시범사업 조사

- 국내외 설치시설 설치 목적별 분류후 설계방법에 대한 연구․분석

□ 하수도 시뮬레이션 수행

- 침수저감 영향 인자 도출

․ 조사된 침수저감 영향 인자별 효과 발현성 검토

․ 영향인자별 최적 범위(최소~최대) 설정

- 물환경 개선을 위한 침투형 빗물받이 구조 검토

․ 유역형상별 CSOs 발생부하량 등 검토

․ CSOs 저감을 위한 구조 적용시 침수해소 효과 검토

- 제안된 침투형 빗물받이 효과 검증

․ 지속시간-재현기간별 최적 침투형 빗물받이 침수해소 효과 검토

□ 침투형 빗물받이 최적 설계 구조 연구

- 도출한 영향인자를 활용한 설계기준 제시

- 설계지침 등 반영 가능성에 관한 검토

Ⅳ		세부추진 일정

일정 주요 사항	5월		6월		7월		8월		9월		10월
계획수립 및 심의추진
착수보고회
침투형 시설 설계 지침 및 가이드라인 조사
국내외 사례조사
침수저감 영향인자 도출
전문가 자문 및 중간보고회
하수도 시뮬레이션 모의
침수저감 영향인자 최적범위 도출
CSOs 저감을 위한 침투형 빗물받이 구조 검토
침투형 빗물받이 최적 설계구조 개발
전문가 자문 및 최종보고회
결과정리 및 보고서 작성

Ⅴ		활용계획

□  ‘15년 침투형 빗물받이 설치 및 하수관로정비사업 추진시 본 연구결과 반영

□  서울시 하수도 업무처리지침(물재생계획과)에 내용 수록

□  2030하수도정비기본계획 및 효자배수분구(광화문지역) 하수관로 개선 및 실시설계 등 우수유출저감시설 설치계획 내용에 연구결과 반영․적용

□  물관리정책과 「물순환 효과분석 및 인프라구축기술 개발연구」의견 제시

Ⅵ		행정사항

□  자체학술용역 심사

❍ 심사계획 : 서면심의

❍ 위원구성

- 위 원 장 : 물재생계획과장

- 내부위원(3인) : 하수관리팀장, 하수정비팀장, 하수정보팀장

- 외부위원(3인) : 연세대학교 사회환경시스템공학부 조원철 교수,

서울연구원 안전환경연구실장 김영란 박사,

㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 신건철 부사장

첨부 : 학술용역심의회(조직담당관) 제출서류 1식.

1) 공무원직접수행 연구계획서 1부.

2) 유사·중복연구 자체 확인 점검표 1부.

3) 연구 T/F 구성도 1부.

4) 연구과제 수행일정표 1부.

5) 연구경비 산출내역 1부.

6) 연구결과 활용계획서 1부.

7) 공무원 직접수행 학술용역심의회 결과보고(자체) 양식 1부. 끝.