문서번호	방재시설부-3030
결재일자	2014.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
임병길		홍석환	05/14 박종웅
협조

폐기물처리용역 설계변경(전체,1차) 검토 보고  송정 사근빗물펌프장 증설공사

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5

도시기반시설본부

방재시설부

폐기물 처리용역 설계변경(전체,1차) 검토보고

(송정 사근빗물처리장 증설공사 건설폐기물 처리용역)

『송정사근빗물처리장증설공사 건설폐기물 처리용역』의 현장여건   변동에 따른 물량증․감 사항에 대해 설계변경 시행코자 함

□ 관련근거

◦ 시설관리공단 공사감독2처 5109호(2014.4.25.)설계변경 보고

◦ 폐기물 추가발생 실정보고에 대한 검토보고〔방재시설부-3567호(2014.3.7)〕

□ 용역개요

◦ 용역개요 : 건설폐기물 운반 및 처리 5,858톤

- 송정펌프장: 4,825톤(폐콘크리트 2,682톤, 건축폐기물 2,143톤)

- 사근펌프장: 1,033톤(폐콘크리트 802톤, 폐아스콘150톤, 건축폐기물 63톤)

◦ 용역기간 : 2013. 3. 15 ~ 2014.6.19

◦ 용 역 비 : 금158,301천원 (1차 금100,000천원)

◦ 용 역 사 : ㈜벽성그린산업

◦ 감 리 사 : 시설관리공단

□ 감리원 보고내용

◦ 송정사근빗물펌프장 토출관로 터파기 공사시 현장매립된 폐콘크리트 및 혼합폐기물 등이 추가 발생하여 폐기물 반출수량 증․감 사항에 대해 설계변경 필요

- 변경내용 (전체 1회)

공 종	규 격	단위	당초	변경	증·감	비고
1. 폐기물 운반	계		2,536	3,104	증 568
폐콘크리트	L=32km	㎥	1,482	1,732	증 250
폐아스콘	〃	㎥	64	82	증 18
건축폐기물	〃	㎥	990	990	-
혼합폐기물	〃	㎥	-	300	증 300
2. 폐기물 처리	계		5,858	6,986	증 1,128
페콘크리트		톤	3,502	4,077	증 575
폐아스콘		톤	150	193	증 43
건축폐기물		톤	2,206	2,206	-
혼합폐기물		톤	-	510	증 510

- 변경내용 (1차1회)

공 종	규 격	단위	당초	변경	증·감	비고
1. 폐기물 운반	계		1,601	2,169	증 568
폐콘크리트		㎥	935	1,185	증 250
폐아스콘		㎥	40	58	증 18
건축폐기물		㎥	625.7	625.7	-
혼합폐기물		㎥	-	300	증 300
2. 폐기물 처리	계		3,702	4,830	증 1,128
페콘크리트		톤	2,213	2,788	증 575
폐아스콘		톤	95	138	증 43
건축폐기물		톤	1,394	1,394	-
혼합폐기물		톤	-	510	증 510

◦ 용역비 증․감 현황(전체1회, 1차1회)                          (단위 : 천원)

공 종	전체분			1 차분			비고
	당초	변경	증․감	당초	변경	증․감
1. 폐기물 운반비	46,584	55,066	8,482	29,404	37,886	8,482
2. 폐기물 처리비	97,327	123,453	26,126	61,505	87,631	26,126
소 계	143,911	178,519	34,608	90,909	125,517	34,608
부가가치세	14,390	17,851	3,461	9,091	12,551	3,461
도급액	158,301	196,370	38,069	100,000	138,069	38,069

□ 조치의견

◦ 시설관리공단이 제출한 폐기물처리용역 설계변경 내용을 검토한 바 적정한 것으로 판단되므로 설계변경(전체1회, 1차1회)을 시행하여 발생 폐기물 처리에  만전을 기하고자 함

따로붙임 1. 감리원 검토보고서 1부

2. 설계변경(전체1회, 1차1회) 내역서 1부.끝.