문서번호	방재시설부-3021
결재일자	2014.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		정일환	05/14 박종웅
협조
	주무관		강종희

「경의선숲길 공원조성공사」

새창고개 구간 옹벽철거 실정보고 검토

2014. 5.

도시기반시설본부

방재시설부

새창고개 구간 옹벽철거 실정보고 검토

(경의선숲길 공원조성공사)

「경의선숲길 공원조성공사」 새창고개 구간 옹벽철거와 관련하여, 내역서에 누락된 옹벽절단 공종에 대한 공종 추가 및 변경 검토 보고임

▶ 관련근거 : 경의경춘(감) 제2014 – 152호

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경의선숲길 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 용산문화체육센터 ~ 가좌역

○ 규    모 : 공원조성 84,608㎡, L=3.5km

○ 사업기간 : ’13. 9. 30 ~ ’16. 3. 31

○ 사 업 비 : 17,705백만원(도급비 12,951, 관급비 4,754)

Ⅱ

실정보고 내용

○ 실정보고 사유

- 『경의선숲길 공원조성공사』 새창고개 구간 도로에 접하는 옹벽(L=151m)은 공원과의 단차를 최소화하고 연결성을 확보하기 위하여 도로 보도부에 맞추어 철거가 계획되어 있으나

- 설계도면에 반영된 공종이 내역서에 누락되어 공종 추가 및 변경이 필요하여 현장여건 및 시공성을 감안하여 반영하고자 함.

○ 현장전경 및 관련단면도

현장전경	단면도

○ 주요변경내용 및 수량검토

- 소음·진동과 깨기 파편 등에 의한 민원과 안전, 시공성을 고려하여 콘크리      트절단(Diamond Wire Saw), 구멍뚫기, 철근콘크리트깨기 공종 반영

※ 서대문고가차도 철거공사 참조

- 현장여건이 미반영된 구조물헐기 공종 제외

구분	규격	단위	당초	변경	증·감	비고
구조물헐기	대형30cm 미만	㎥	46	-	감) 46
구멍뚫기	D50	공	-	21	증) 21
철근콘크리트절단	D.W.S	㎡	-	79.77	증) 79.77
철근콘크리트깨기	30cm이상	㎥	-	34.65	증) 34.65

○ 단가산정

- 신규단가

· 구멍뚫기 : 표준품셈 및 2014년 현재 조사단가 적용

· 철근콘크리트절단 : 2014년 조달청 시장시공가격 적용

· 철근콘크리트깨기 : 2014년 실적단가 적용

- 낙찰율 80.013% 적용

○ 소요공사비

(단위:천원)

공종	당 초	변 경	증 · 감	비 고
구조물헐기	6,355	-	감) 6,355
구멍뚫기	-	1,358	증) 1,358
철근콘크리트절단	-	24,510	증) 24,510
철근콘크리트깨기	-	966	증) 966
순공사비(철거공)	6,355	26,834	증) 20,479
2. 제경비(부가세포함)	3,433	10,907	증) 7,474
3. 도급비	9,788	37,741

Ⅲ

감리단 검토의견

○ 새창고개 구간 옹벽철거 실정보고 건에 대하여 검토한 결과 현장여건(소음·진동과 깨기 파편등에 의한 민원)과 시공 및 안정성(철근콘크리트 옹벽 철거)등을 고려하여 반영함이 타당하며,

○ 소요 공사비(증 28백만원)에 대한 수량 및 단가 등은 적정하게 산출된 것으로 판단됨.

Ⅳ

검토결과

○ 새창고개 구간 옹벽철거와 관련, 설계도면에 반영된 공종(옹벽절단)이 내역서에 누락되어 공종 추가 반영함이 타당

※ 관련규정 : 공사계약일반조건 제6절 공사설계의 변경(1.설계변경 가항 1)

1) 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는                  점이 있을 경우

○ 누락 공종 추가와 관련하여 새창고개 구간은 아파트 밀집지역으로 옹벽절단 시 소음 및 진동 민원이 예상되어 다이아몬드 와이어쏘로 옹벽 절단이 타당한 것으로 판단되며,

○ 옹벽절단에 대한 추가공종에 대하여 설계변경 시 반영토록 승인하고자 함.

따로붙임 : 감리단 실정보고서 1부.  끝.