투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	장충체육관 리모델링공사 책임감리자
(경유)
제목	장충체육관 리모델링공사 하도급 변경계약 처리 통보

1. JCR14-111(2014.05.02)호와 관련입니다.
2. 위 호로 우리본부에 검토보고한「장충체육관 리모델링공사」의 하도급 변경계약에 대하여 아래와 같이 처리 통보하오니 하도급관리 및 공사관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

○ 하도급 변경계약 내용

공 종	구 분	원도급자	하도급자	하도급 기간	원도급 금액 (원)	하도급 금액 (원)	하도급 비율	비 고
철골공사	변경 전	성지건설(주) 이관호	㈜건원건설 이방우	2013.06.25~ 2014.06.02	1,000,619,443	1,039,500,000	103.89%
	변경 후	성지건설(주) 이관호	(주)경수제철 백종서	2014.04.25~ 2014.11.30	806,424,680	1,441,000,000	178.69%

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이광백		의료시설과장	장윤수		건축부장	05/14 이병석
협조자	주무관	신현성
시행	건축부-5873	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문 37)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2619	/전송	02-3708-2659	/	nepdo@seoul.go.kr	/	대시민공개