문서번호	시설보수과-1824
결재일자	2014.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
최태석		박춘배	05/14 정진오
협 조

준공기한 연기보고

[장안교(구교) 성능개선공사 실시설계용역]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

성동도로사업소

(시설보수과)

준공기한 연기보고

우리 사업소에서 추진중인 ‘장안교(구교) 성능개선공사 실시설계용역’을 시행함에 있어, 준공기한 연기사유가 발생하여 이에 대한 검토 보고임

Ⅰ		사업개요

사 업 명 : 장안교(구교) 성능개선공사 실시설계용역

사업기간 : 2013.06.04. ~ 2014.05.31.

용 역 비 : 362,160천원

용 역 사 : ㈜서영엔지니어링 외 1개사

Ⅱ		준공기한 연기

사  유

- 건설기술심의(2014.04.28.) 결과 ‘조건부 채택’된 바, 조건부로 제시한 설계기간 재검토 및 설계감리 시행, 경관조명에 대한 디자인 심의 이행 등 관련 절차를 수행하기 위하여 절대 공기 부족

기  간

- 당초 준공기한 : 2014.05.31

- 변경 준공기한 : 2014.08.31(92일 연장)

관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제90조

지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅲ		조치의견

상기 보고내용과 같이 본 용역 수행중 건설기술심의 결과 반영 등 설계 보완에 필요한 절대 공기가 부족한 실정으로, 상기와 같이 준공기한을 연기하여 용역의 내실을 기하고자 함.

붙임  관련 공문 1부. 끝.