문서번호	기전과-5908
결재일자	2014.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	기전과장
양상규		한영호	05/14 박재경
협조
	주무관		박태진

『2013년 교통사고 잦은곳 개선 교통신호기 공사(2차)』

실정보고(2차)에 따른 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.05

강서도로사업소

기 전 과

『2013년 교통사고 잦은곳 개선 교통신호기 공사(2차)』

실정보고(2차)에 따른 검토보고

『2013년 교통사고 잦은곳 개선 교통신호기 공사(2차)』와 관련, 현장여건에 따라 책임감리원으로부터 공사물량 변경 실정보고가 있어 검토보고 합니다.

관련근거

〇 건영-개선14-05-117(2014.05.12)

- 2013년 교통사고 잦은곳 개선 교통신호기 공사(2차) 실정보고서 제출

공사현황

〇 공 사 명 : 2013년 교통사고 잦은곳 개선 교통신호기 공사(2차)

〇 공사위치 : 마포대교남단사거리(영등포구 여의도동),

영등포전화국사거리(영동초교(보))

〇 도 급 비 : 금101,889,800원

〇 공사내용 : 교통신호기(차량등 및 보행등) 개선(이설 및 신설)

〇 공사기간 : 2013.12.06. ~ 2014.05.24

〇 시공업체 : (주)에이텍파워 대표 이고운

〇 감리업체 : (주)건영이앤씨 대표 박준범

실정보고 검토

▢ 주요내용

〇 당초 설계도서상 현장 불일치 사항 및 누락사항 물량 반영

〇 노후된 차량 및 보행신호등 교체 물량 반영

〇 선행공정(토목)의 변경으로 인한 물량 반영

▢ 지점별 세부내용

공사장소	시공내용		구분	단위	수량		변경내용	비고
					당초	변경
마포대교 남단	지주형좌대 기초설치(사급)	600㎜×600㎜×600㎜(사급)	신설	EA	1	0	당초 이설 예정 제어기가 선행공정(토목)의 가각정리 변경으로 존치 당초 이설 예정 이었던 차량 및 보행신호등이 노후,파손되어 있어 물량 변경 반영 설계도서상 지주 규격 불일치 변경 반영 선행공정(토목)의 보행섬 확장으로 당초 기초앙카 재사용 구간 중 횡단보도와 이격거리가 발생하여 물량 변경 반영 경보등 인입전원선이 신호케이블과 결선되어 있어 분리후 신설 경찰청 다기능 카메라 전원 및 경보등 전원 누전차단기 설치 당초 설계도서상 오기, 누락된 물량 반영
	제어기 지주형좌대(공통) 이설	지주형(용융)-공통	이설	본	1	0
	지주형좌대 기초	600㎜×600㎜×600㎜	철거	EA	1	0
	차량신호등	LED,1면3,4색(관급) 1조	신설	조	0	1
	차량신호등	LED,1면3,4색(관급) 2조동시	신설	조	0	4
	보행신호등	LED,1면2색(관급)	신설	조	0	5
	차량신호등	LED,1면3,4색(관급) 1조	교체	조	0	3
	보행신호등	LED,1면2색(관급)	교체	조	0	3
	차량신호등	LED,1면2,3,4색 1조	이설	조	1	0
	차량신호등	LED,1면2,3,4색 2조	이설	조	4	0
	보행,잔여시간,보조등	LED,1면2,3색	이설	조	10	5
	차량신호등	LED,1면2,3,4색 1조	철거	조	2	1
	차량신호등	LED,1면2,3,4색 2조	철거	조	0	2
	차량신호등	LED,1면2,3,4색 3조	철거	조	0	2
	보행,잔여시간,보조등	LED,1면2,3색	철거	조	0	5
	교통신호등 지주	용융, ø300㎜×8m	이설	본	5	0
	교통신호등 지주	용융, ø250㎜×8m	이설	본	0	5
	지주기초 및 앙카	ø300㎜×1.8m	신설	EA	5	0
	지주기초 및 앙카	ø250㎜×1.8m	신설	EA	0	5
	지주기초 및 앙카	ø125㎜×1.2m	신설	EA	0	1
	기초앙카부분제거	ø300㎜×0.3m	철거	EA	1	0
	기초앙카부분제거	ø250㎜×0.3m	철거	EA	0	2
	기초앙카부분제거	ø200㎜×0.3m	철거	EA	0	1
	신호케이블	F-CVV 2.5SQ×5C	신설	m	1,251	1,126
	전원선	F-CV 6SQ×2C	신설	m	0	139
	전선관	PE ø54㎜	신설	m	32	10
	전선관	PE ø104㎜	신설	m	0	19
	보도블럭포장복구비	보행보도	신설	m	64	0
	핸드홀	600	신설	EA	0	1
	핸드홀	800	신설	EA	2	0
	누전차단기	ELB 2.5KA, 2P, 10~30A	신설	EA	0	2
	교통안내표지	각종	이설	EA	0	4
영등포전화국(영동초교(보))	콘크리트좌대	900㎜×600㎜×1600㎜	철거	EA	1	0	당초 설계도서상 오기, 누락된 물량 반영 가공배선을 위한 지주규격 변경 반영 당초 설계도서상 철거 예정인 맨홀에 타 시설물 케이블이 인입되어 있어 교체 반영
	콘크리트좌대	900㎜×600㎜×1200㎜	철거	EA	0	1
	제어기신형차광막	FRP 150×100㎜	철거	EA	0	1
	차량신호등	LED,1면2,3,4색 3조	철거	조	0	2
	디자인지주	ø125㎜×6m	신설	본	0	1
	디자인지주	ø125㎜×4m	신설	본	1	0
	기초앙카부분제거	ø125㎜×1.2m	철거	EA	0	1
	기초앙카부분제거	ø125㎜×0.3m	철거	EA	2	1
	맨홀(사각)고재	주철(600 맨홀뚜껑)	고재	EA	0	3
	맨홀(사각)고재	주철(800 맨홀뚜껑)	고재	EA	0	2
	신호케이블	F-CVV 2.5SQ×5C	신설	m	220	250
	전원선	F-CV 6SQ×2C	신설	m	10	40
	전송선	cpev 0.65㎜×5P	신설	m	40	77
	전선관	PE ø104㎜	신설	m	16	8
	보도블럭포장복구비	보행보도	신설	m	38	0
	핸드홀	800	신설	EA	1	0
	핸드홀	600	교체	EA	0	1
	핸드홀	600	철거	EA	3	2
	교통안내표지	각종	이설	EA	0	3
	콘크리트폐기물처리비		폐기	㎥	59.9	0

변경금액

구 분	변 경 전	변 경 후	증·감 (개략액)
공급가액	₩92,627,091원	₩89,962,682원	감 2,664,409원
부가가치세	₩9,262,709원	₩8,996,268원	감 266,441원
도급금액	₩101,889,800원	₩98,958,950원	감 2,930,850원

※ 변경금액은 개략금액으로 추후 준공 설계변경시 정확한 물량정산 예정임.

조치의견

위 보고내용과 같이 최초 원설계도서와 상이한 부분이 발생하여 실정보고 내용을 검토한 결과 현장여건에 따라 공사물량 변경사유가 타당하다 사료됨으로 승인 통보 조치코저 합니다.

붙임 : 기술검토의견서 1부.