문서번호	도로보수과-4346
결재일자	2014.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	강서도로사업소장
박상구	김효식	05/14 이규상

증미산 낙석지역 외부전문가

자문 결과 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5

강서도로사업소

도로보수과

증미산 낙석지역 외부전문가 자문 결과 검토 보고

증미산 낙석발생 지역에 대하여 외부전문가의 자문을 받아 조치

방안을 검토하고 보고 드림

1		공사 현황

○ 공사명: 증미산 도로사면 보강공사

○ 공사기간: 2013.12.23. ~ 2014.5.12

○ 공사개요: 락볼트 482공, 낙석방지망 1,626㎡

○ 소요예산: 365,202천원

○ 계약자: ㈜동아기업(공사감독-시설관리공단)

○  추진사항: 락볼트공 완료, 면고르기 시행 및 낙석방지망 시공 중

2		낙석 발생 현황

○ 일시: 2014.5.2. 17:30 경

○ 위치: STA4~STA5 사이 낙석방지울타리 상부 2m 부분

○ 낙석 현황: 지름 20cm이내 20여개 사면하부 화단부 낙석

○ 원인: 기존 부석이 노면 토사와 함께 떨어짐

○ 조치사항: 낙석 및 부석 제거, 낙석 방지용 임시 합판설치

3		외부 전문가 자문 시행

○ 자문일시: 2014.5.3. 08:00 ~ 및 5. 9. 14:00 ~

○ 외부전문가

- ㈜한맥기술 부사장 박윤규, ㈜동림건설기술 대표 김재헌,

㈜동산엔지니어링 대표 이동균, ㈜동부엔지니어링 전무 강휴택

○ 외부전문가 의견

외부전문가	의 견
박윤규	- 현재 비탈면 안정성에는 큰 문제점이 없으나, 계단식 옹벽 등에 의한 보강 필요 - 낙석방지망 재설치 필요 ZONE3 경계부 자연배수로 산마루 측구와 연계 도수로 설치
김재헌	불안정층을 정리하고 숏크리트 등으로 안정화 필요 사면 상단부에 묘지, 철탑 등이 산재되어 토사유실 우려 및 돌림수로 변으로 유수 유입 차단 필요 종․횡배수로에 대한 종합검토 필요
이동균	- 숏크리트 시공 및 낙석방지망 설치 배수관계 철저 검토 요망
강휴택	- 숏크리트 시공 후 낙석방지망 및 낙석방지책 설치 권장

4		의견 검토

□ 낙석지역 대책

○ 전문가 의견

- 3인이 숏크리트에 의한 안정화, 1인이 계단식 옹벽 설치에 의한           보강 제시

○ 조치 의견

- 다수의 의견인 숏크리트 시공에 의한 노출 암반층에 대한 안정화를            우선 시행하고, 계단식 옹벽 설치 등 장기적 안정화 방안 강구

□ ZONE3 경계부 자연배수로 설치 및 배수관계 검토

○ 현 황

- 배수로 설치 의견이 있는 계곡형 자연배수로 형태의 지역은, 별첨           산마루 측구 현황 사진과 같이 횡경사인 산책로 및 반달형 돌림           수로에 접하여 있으며

- 우측 ZONE3 사면의 일부 풍화된 암석 및 토사가 계곡 쪽으로            유출되어 있음

○ 조치 의견

- 위 현황과 같이 계곡 상부는 계곡이 형성되어 있지 않고 돌림수로           등으로 단절되어 있으며 하부만 계곡으로 이루어져 산마루 상부의           유수 유입은 미미할 것으로 보이며

- ZONE3 사면의 풍화된 암석부에 대한 대책을 선행하고 배수로 상부의           우수 유입 면적 및 형태, 설치된 돌림수로의 기능 유지 가능 등            외부 전문가의 의견과 같이 사면 배수로에 대한 전반적인 검토 후,           설치여부를 판단하는 것이 바람직 할 것으로 사료됨

□ 상부 토사 유실 우려 및 돌림수로 변 유수 유입 차단 필요

○ 현 황

- 사면 상부에는 60년대 설치한 분묘가 몇기 있으나 아카시 및             잡목, 풀 등이 밀생하여 토사 유실 흔적을 찾기가 어려우며

- ZONE1 및 ZONE2 일부 구간은 별첨 사진과 같이 콘크리트 개거           수로가 설치되어 있고,  ZONE2 ~  ZONE3 구간은 반달형 수로가           설치되어 있음

○ 조치 의견

- 콘크리트 개거 수로는 좌․우로 폭 30cm정도의 보호콘크리트가           설치되어 별도의 조치가 불필요 할 것으로 보이고

- 반달형 수로는 일부 지표면과 단차가 있게 설치되어 있는 부분도           있으나 상부 사면의 길이가 10~15m 정도로 잡목이 우거지고           종방향의 경사로 인해 유입량은 매우 적을 것으로 판단되므로

- 위 배수관계 검토의견과 같이, 배수로 상부의 우수 유입 면적 및           형태, 설치된 돌림수로의 기능 유지 가능 등 사면 배수로에 대한           전반적인 검토 후 개선 방안을 검토하는 것이 바람직 할 것으로           판단됨

5		보수 및 조치방안

□ 낙석 지역

○ 우선, 숏크리트 타설로 사면 안정화 시행 후 장기적인 보수           방안을 강구토록 관리부서에 통보(도로시설과 및 시설관리공단)

- 긴급한 사항임을 감안, 기배정된 예산을 활용하여 우선 시공 후           설계변경(정산)

□ 자연배수로 설치 및 배수관계 종합 검토 등

○ 관리부서에 필요 여부를 검토토록 통보

붙임 1.자문 의견서 1부.

2. 산마루 돌림수로 현황 사진 1부. 끝.