문서번호	산지방재과-4651
결재일자	2014.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		사면정비팀장	산지방재과장
유진석		조성만	05/14 정중곤
협조
	사무관		오승민

강서구 낙찰차액 사용승인요청에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

푸 른 도 시 국

(산지방재과)

낙찰차액 사용승인요청에 대한 검토보고

강서구에서 시행중인 2014년 예방사방사업(계류보전-궁산지구)외 1개소에 현장여건상 부득이하게 추가되는 공종에 대하여 낙찰차액을 사용하고자 승인을 요청한 사항임.

1. 관련근거 : 강서구 공원녹지과-7629(2014.5.2)호 및 강서구 공원녹지과-7668(2014.5.2)호와 관련임.

2. 공사개요 및 현황

○ 공 사 명 : 2014년 예방사방공사(계류보전-궁산지구)

• 도 급 액 : 금200,283,500원

• 공사기간 : 2014. 3. 26 ~ 6. 3

• 낙찰차액 사용금액 : 15,648천원(도급 13,513천원, 관급 2,135천원)

(단위 : 천원)

발 주 액	도 급 액	낙찰차액	금회승인 요청금액	집행잔액
250,312	200,283 (관급 19,820)	30,209	15,648	14,561

• 낙찰차액 사용사유

- 토지주 반대로 배수관로 선형변경에 따른 지장물 철거 및 복구 공사비 증가 (증 2,968천원)

- 무허가건물 상류쪽 계류 사면안식각 유지를 위해 석축 추가 설치 등 현장 실정에 따른 구조물 수량 변경 (증 3,037천원)

- 상기 구조물 수량 변경에 따른 자재대, 관급자재비, 제경비 증가 (증 9,643천원)

• 현황사진

당초(배수로 선형)	변경(배수로 선형)	배수로 변경

흄관D500

○ 공 사 명 : 2014년 예방사방공사(계류보전-봉제산2지구)

• 도 급 액 : 금93,397,900원

• 공사기간 : 2014. 3. 26 ~ 6. 3

• 낙찰차액 사용금액

(단위 : 천원)

발 주 액	도 급 액	낙찰차액	금회승인 요청금액	집행잔액	비 고
131,457	93,397	14,166	0	14,166	미반영

• 낙찰차액 사용사유

- 설계시 깬잡석(4,562개) 자재비 누락에 따른 자자재 반영 필요(증 13,423천원)

3. 조치계획

○ 강서구에서 시행중인“2014년 예방사방사업”2건에 토지주 반대에 의한 변경사항과 현장여건상 부득이하게 추가되는 공종에 대하여 낙찰차액을 사용하여 정비하고자 승인을 요청한 사항임.

○ 깬잡석 자재비 누락분 승인요청 사업은 총액계약사업으로 계약금액 한도에서 계약이행이 완료되어야 할 사항이며, 계약금액내 누락단가는 반영할 수 없음

• 깬잡석 자재비 누락 요청분 제외 : 13,423천원 → 0천원(미반영)

○ 본 사업의 원활한 진행을 위하여 낙찰차액 승인요청 금액중 조정금액을 제외한 추가 요청사업비(15,648천원)를 사용승인하고, 변경되는 사항에 대하여는 정산에 만전을 기하고 공사기간 연장 없이 우기전에 완료될 수 있도록 통보코자 함.

붙임 : 1. 예산지원요청 공문 2부.

2. 감리 실정보고서 2부. 끝.