투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	폐기물처리용역 설계변경 계약의뢰 (송정,사근 빗물펌프장 증설)

1. 우리 본부에서 시행중인 「송정,사근빗물펌프장 증설공사 건설페기물처리용역」에 대한 설계변경을 아래와 같이 시행코자 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 송정, 사근빗물펌프장 증설공사 건설페기물처리용역

나. 용역개요 : 건설폐기물 운반 및 처리 5,858톤

- 송정펌프장 : 4,825톤(폐콘크리트 2,682톤, 건축폐기물 2,143톤)

- 사근펌프장 : 1,033톤 (폐콘크리트 802톤, 건축폐기물 63톤, 폐아스콘 150톤)

다. 용 역 비 : 158,301천원 (1차 100,000천원)

라. 용역기간 : 2013. 3. 15 ~ 2014. 6. 19

마. 용 역 사 : ㈜벽성그린산업

바. 설계변경 사유 : 건설폐기물 발생수량 증․감 등

사. 예산과목 : 도시안전실 하천관리과, 치수및하천관리, 수방대책사업, 사근빗물펌프장시설용량증대, 시설비및부대비, 시설비

아. 설계변경 내역

【 변경금액 (전체 1회)】

1                                   (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비고
용역비	158,301,570	196,370,900	증) 38,069,330

【 변경금액 (제1차 1회)】

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비고
용역비	100,000,000	138,069,330	증) 38,069,330

※ 용역기간 변경없음

붙임  1. 설계변경 시행방침 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	임병길		방재시설과장	홍석환		방재시설부장	05/14 박종웅
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	방재시설부-3063	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 덕수궁길 15	/
전화	3708-8762	/전송	3708-8756	/	bglim@seoul.go.kr	/	대시민공개