문서번호	기전설비2과-2019
결재일자	2014.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비2과장	시설부장
권혁제		김두석	05/14 차광재
협조
	주무관		김영찬

-‘14년 한강공원 야외수영장 보수공사 -

추가공종 처리방안 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  5.   .

한강사업본부 시설부

[기전설비2과]

-‘14년 한강공원 야외수영장 보수공사 -

추가공종 처리방안 검토보고

본부, 시설공단, 시공사 합동점검 시 지적사항에 대한 시설공단의 조치방안 검토 및 처리계획을 보고 드림.

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 :‘14년 한강공원 야외수영장 시설물 보수공사

공사내용 : 수조도장 27,300㎡, 타일설치 1,600㎡ 등

공사기간 : 2014. 4. 7. ～ 2014. 9. 30.

시 공 사 : 주식회사 승화프리텍

도 급 비 : 1,332백만원

공 정 률 : 55%

Ⅱ		추 진 경 위

2014. 04. 16 : 공사현장에 대한 본부, 시설공단, 시공사 합동점검

2014. 04. 18 : 합동점검 결과 통보 및 조치방안 검토 지시 (시설공단)

2014. 05. 09 : 공사 실정보고서 제출 (시설공단 ⇒ 본부)

Ⅲ		보고내용 검토

관련근거 : 시설관리공단 공사감독1처-3568호(2014.05.09.)

검토내용

□ 여의도 수영장 성인 청소년풀 수조 벽체 미장몰탈 들뜸

▹처리방안 : 수조벽체 미장몰탈 제거후 바탕면 처리 및 페인트 도장

- 미장몰탈 제거 및 단면정리 ⇒ 고압수 세정 ⇒ 표면강화제 ･ 프라이머 ･ 바탕조정재 도포 ⇒ 도장

(뚝섬 유수풀 벽체보수공법 적용)

▹제거물량 : t=3cm, A=128㎡, V=3.8㎥

▹발생폐기물은 폐기물처리용역에 반영하여 처리.

▹현황사진

벽체 들뜸부 현황	들뜸부 몰탈 제거

□ 망원수영장 벽체 월류부 스텐강관 탈락 및 바닥콘크리트 열화

▹성인풀 벽체 월류부 스텐강관(D=50mm) 및 하부몰탈 탈락부

- 처리방안 : 스텐강관 전체 제거 후 단면정리 및 도장

･ 스텐강관 철거 ⇒ 몰탈 제거 및 단면정리(10cm) ⇒ 표면그라인딩 ⇒ 도장

- 제거물량 : 스텐강관(D=50mm) 161m, 발생재는 고재처리

▹청소년풀 바닥콘크리트 열화 및 균열부

- 처리방안 : 콘크리트 손상부 치핑 후 단면보수 및 도장

･ 콘크리트 치핑(3cm) ⇒ 고압수 세정 ⇒ 표면강화제 ･ 프라이머 도포 ⇒ 폴리머몰탈 충진⇒ 도장

(잠실 청소년풀 바닥보수공법 적용)

- 제거물량 : 바닥콘크리트 21㎡

▹현황사진

스텐강관 및 하부몰탈 탈락	바닥콘크리트 열화

□ 공사비 검토

▹단가적용

- 신규공종인 스텐강관 철거는 설치비용의 50% 적용 후 낙찰율(86.76%) 적용

- 이외 공종은 기 계약단가 적용

▹개략 공사비

구 분	단위	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
추가 보수공	천원	-	10,085	10,085	제경비 율 ≒ 65.2%
제 경 비		-	6,577	6,577
계		-	16,662	16,662

▹예산조치 : 기 확보된 이설비(16,029천원) 및 관급자재 구매 잔액(6,653천원) 사용.

Ⅳ		검토의견 및 조치 계획

검토의견

□ 계약내역에 미포함된 지적사항은 이용자 안전 및 하자방지를 위해 추가

보수가 필요하며,

□ 증가된 물량에 대한 단가적용은 적정한 것으로 판단됨.

조치계획

□ 시설공단의 실정보고 건 승인 및 향후 설계변경 시 증가된 물량을 반영하여 정산            처리토록 지시하고자 함.

첨 부 : 공사 실정보고 제출 공문 1부.  끝.