투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2013년 교통사고 잦은곳 개선 교통신호기 공사(2차) 실정보고(2차) 승인 통보

1. 건영이앤씨(주) 건영-개선14-05-117(2014.05.12)호와 관련입니다.

2.  『2013년 교통사고 잦은곳 개선 교통신호기 공사(2차)』 와 관련하여, 실정보고한 사항에 대하여 검토한 결과, 원안대로 승인하오니 공사품질 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 실정보고사항

공사명	시공사	실정보고 내용	검토결과	비고
2013년 교통사고 잦은곳 개선 교통신호기 공사(2차)	㈜에이텍파워 대표 이고운	영등포구 여의도동 마포대교남단사거리 외 1개소에 대한 사항 ․ 설계서 내용과 공사현장이 상이하여 시공현장 여건에 맞게 설계내용 변경 반영 ․ 노후된 차량 및 보행신호등 교체 물량 반영 ․ 선행공정(토목)의 변경으로 인한 물량 반영	승인

※ 실정보고에 따른 검토보고 내용 참조

붙임 : 실정보고에 따른 검토보고 1부. 끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	(주)에이텍파워 현장대리인,(주)건영이앤씨 책임감리원
★주무관	양상규		주무관	한영호		기전과장	05/15 박재경
협조자	주무관	박태진
시행	기전과-5954	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로237(마곡동 67-1)	/
전화	2657-7969	/전송	2657-7939	/	ysg007@seoul.go.kr	/	대시민공개